아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	실정보고(공사용 가도설치외 2건) 승인 통보

1.업무지시현장 : 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사(장기1차) 하웅종합건설

(주), 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사(장기1차) 주식회

사 케이지엔지니어링종합건축사사무소, 창동 상계 동서간 연결교량 보

차도교 건설공사(장기1차) 주식회사 동해종합기술공사, 창동 상계 동

서간 연결교량 보차도교 건설공사(장기1차) 주식회사 삼보기술단

2.작 성 일 자 : 2024-06-26 13:06:43

3.지 시 내 용

가. 창동상계 제24-127호(2024.6.17.), 128호(2024.6.18.) 및 133호(2024.6.24.)와 관련입니다.

나. 위 호와 관련하여 가도 설치 및 철거, 산책로차단에 대한 실정보고사항을 승인통보하오니 후속조치를 시행하고 추후 설계변경에 반영토록 하여 주시기 바랍니다.

다. 특히, 하천을 통제하고 진행하는 공사인만큼 주민불편사항이 발생하지 않도록 안전 및 공사안내에 주의를 기울여 주시기 바랍니다.  끝.

주무관	송진수		주무관	김경수		교량건설과장	06/26
이성주
협조자
시행	토목부-12770	(	2024. 6. 26.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 도시기반시설본부 토목부	/	http://seoul.go.kr
전화	02-6438-2144	/전송	02-6438-2199	/	jinsoo@seoul.go.kr	/	부분공개(5)