문서번호	시설관리과-10598
결재일자	2024. 6. 26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
안전관리팀장		시설관리과장	서부수도사업소장
김철수		권승계	06/26
			代김종은
협 조
	주무관			김기문

관급자재 납품연기 보고서

(연희배수지(1호지)외 1개소 내부 방식공사)

2024. 6. 25.(화)

서부수도사업소

(시설관리과)

관급자재 납품연기 보고서

(연희배수지(1호지)외 1개소)

***********************************3

우리사업소에서 시행 중인「연희배수지(1호지)외 1개소 내부 방식공사」의 준공기한이 연기 됨에 따라 이와 관련하여 공사에 소요되는 관급자재 납품기한을 연기 하고자 합니다.

1		관련근거

□ 준공기한 연기 검토보고(연희배수지)〔시설관리과-10108(2024.6.19.)〕

□ 당초: 2023. 7. 20 ~ 2024. 6. 30

□ 변경: 2023. 7. 20 ~ 2024. 8. 14(45일연기)

2		공사현황

□ 공 사 명: 연희배수지(1호지)외 1개소 내부 방식공사

□ 공사기간: 2023.07.20.~2024.08.14.

□ 도 급 비: ************

□ 공사개요: 도막식 방수방식 2,125m², 패널식 방수방식 394m²

□ 도 급 자: *******

3		관급자재 구매 현황

□ 구매내역: 도막방수재

□ 계약업체: *************

□ 구매현황

구분	품명 / 규격	수량(㎡)	인도조건	납품기한	금액
*		*****			***********
**	**********************	*****	*****	***********	***********
**	**********************	***	*****	***********	**********

4		납품연기 사유

□ 연기사유

□ *********************************************************************************

□ 납품연기

**************************************

**********************************************

*****************

***************

5		행정사항

□ 행정지원과에 변경계약 의뢰. 끝.