문서번호	정수과-2929
결재일자	2024. 6. 25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김경희		김경진	06/25
			代김경진
협조
	주무관		김동석

사업장폐기물(무기성 정수오니) 처리용역(2차-2) 설계 변경 계획

2024.  6.

구의아리수정수센터

(정  수  과)

사업장폐기물(무기성 정수오니)

처리용역(2차-2) 설계 변경 계획

소장 :김재웅☎3146-5401 정수과장 :김경진☎5440 담당 : 김경희☎5452

2024년도「사업장폐기물(무기성 정수오니) 처리용역」계약 지연에 따라 기존 업체와 2차년도 계약기간 연장 및 처리물량을 변경하여 변경계약을 시행하고자 함.

Ⅰ		2024년 용역 계획

□ 2024년도 위탁처리 계획

○ 용 역 명 : 사업장폐기물(무기성 정수처리오니) 처리용역(장기계속 단가계약)

○ 계약기간 : 2024. 1. 1. ~ 2024. 6. 30.

○ 계약물량 및 기초금액 :******************

□ 추진경과

○ 사업장폐기물(무기성정수처리오니) 위탁처리 용역 계획 수립 : '24. 4. 12.

○ 공고 및 계약의뢰(시청 재무과) : '24. 4. 24.

○ 개찰 및 낙찰 하한선 미달에 따른 유찰  : '24. 5. 3.

○ 유찰에 따른 재공고 의뢰(시청 재무과) : '24. 5. 8.

○ 개찰 결과 발표 : '24. 5. 17.

********************************************* 등

○ 2024년도 계약 지연에 따른 따른 2차수 계약기간 및 용역물량 변경

- 계약기간 1개월 연장('24.5.31→'24.6.30) 및 물량 변경(4,500톤 → 5,000톤)

〔사업장폐기물 처리용역(2차수) 설계변경 계획(정수과-2482호, 2024.5.30)〕

○ ****************** 적격심사 점수(95점) 미달에 따른      부적격 통보 : ******************************

○ 3순위 업체인 *****에 대한 적격심사 진행 중 : 시청 재무과

- 적격심사 서류 제출 기한 : ~ '24. 6. 27.(목)

Ⅱ		설계변경 계획

□ 계약현황

○ 계약업체

구분	상호	대표자	주소	비 고
처리	********	***	*******************
운반	*******	***	**************************

○ 계약기간 : 2023. 6. 1. ~ 2024. 6. 30.

○ 계약단가 : *************************************

□ 설계변경 내역

○ 변경사유 : 2024년도 용역 계약 지연에 따른 기존 업체 계약 연장

○ 변경사항 : 2차년도 2차 용역 계약기간 연장 및 처리물량 변경

구 분	당 초	변 경	비 고
계약기간	2024.1.1~2024.6.30	2024.1.1~2024.7.31	1개월 연장
처리물량	5,000톤	5,800톤	800톤 증가

○ 총 차수별 변경물량 및 금액

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
총괄	물량(톤)	*********	*********	****
	금액(원)	***********	***********	***********
1차년도	물량(톤)	********	********	*
	금액(원)	***********	***********	*
2차년도	물량(톤)	*****	*****	****
	금액(원)	***********	***********	***********

Ⅲ		행 정 사 항

○ 변경계약 의뢰 : 행정관리과

붙 임  1. 합의서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 적격심사 부적합 통보(재무과) 각 1부.  끝.