문서번호	도로보수과-8663
결재일자	2024. 6. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	남부도로사업소장
김순한		송광석	06/25
			조현석
협 조
	주무관			정철식

서초동 노후포장도로 정비공사 폐아스콘 운반 및 처리용역 설계변경 검토 보고

2024. 6.

남부도로사업소

(도로보수과)

서초동 노후포장도롤 정비공사 폐아스콘 운반 및 처리용역

설계변경 검토 보고

우리 사업소에서 시행 중인『서초동 노후포장도로 정비공사 폐아스콘 운반 및 처리용역』와 관련하여 건설사업관리단에서 제출한 용역기간 변경에 대하여 검토 후 그 결과를 보고드림

Ⅰ		용 역 개 요

용 역 명 : 서초동 노후포장도로 정비공사 폐아스콘 운반 및 처리용역

규    모 : 폐아스콘 운반 처리 18,660톤

계약금액 : 금466,759,000원

용 역 사 : (주)씨와이환경 대표 최완준 외 1개사

감 리 사 : (주)동해종합기술공사외 2개사

용역기간 : 2023.11.22. ~ 2024.06.30.

Ⅱ		보 고 사 항

준공기한 변경

변경 사유

- 2024년 서초동 노후포장도로 정비공사 시행 관련 회의 참석요청[도로보수과-5718(24. 4.18)]

- 설계변경(제1회) 검토보고(서초동 노후포장도로 정비공사 폐아스콘 처리용역)(토목감리부-24-1332(24.6.20)

• 서초동 노후포장도로 정비공사 구간인 반포대로, 서초대로에 SK텔레콤, LG U+, 코원에너지 등 유관기관 굴착공사가 5월 중순부터 6월 초까지 진행되었음.

• 당초 4월부터 반포대로 배수성아스콘 포장공사 시작하고자 하였으나 유관기관의 굴착공사 병행으로 전체 공정이 지연되어 용역계약기간 연장이 필요함.

용역기간 변경

• 당초 : 2023.11.22. ~ 2024.06.30.

• 변경 : 2023.11.22. ~ 2024.07.30.(증 30일)

설계변경금액 : 없음

구 분		금 액(원)			비고
		당 초	변 경	증․감
총 용 역 비		466,759,000	466,759,000	0
도급비	공 급 가 액	424,326,364	424,326,364	0
	부가가치세	42,432,636	42,432,636	0
	소 계	466,759,000	466,759,000	0

예산과목

도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설비및 부대비, 시설비

Ⅲ		검 토 의 견

건설사업관리단이 제출한 검토의견이 적정한 것으로 판단되어 상기

보고사항을 반영하여 용역기간 설계변경을 시행하고자 함

Ⅳ		향 후 계 획

2024. 06.26. 설계변경 시행

2024. 07.30. 용역 준공

붙 임  기술검토의견서(감리) 1부. 끝.