아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경 시행(2차최종) 및 계약의뢰 (2023년 은평구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사)

우리사업소가 시행중인『2023년 은평구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가계약)』에 대하여 설계변경 심의 결과에 따라 아래와 같이 설계변경(2차최종) 및 차수별 계약금액 변경을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2023년 은평구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가계약)

나. 수 급 인 :***************

다. 계약기간 : 2023. 6. 20. ~ 2024. 6. 30.

라. 계약금액 변동내역

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증 감
계(총부기금액)	794,138,800	792,968,000	감)1,170,800
1차수(2023년)	522,918,000	522,918,000	증감없음
2차수(2024년)	271,220,800	270,050,000	감)1,170,800

마. 설계변경 사유 : 계약물량 증·감

바. 예산과목

- 안전하고 안정적인 아리수공급, 맑은물길조성, 노후밸브정비, 시설비및부대비, 시설비

- 안전하고 안정적인 아리수공급, 시설물관리 최적화, 배수지 아리수올림터 유지보수, 수선유지교체비

- 소방재난능력의 향상으로 안정적인 재난시스템구축, 소방용수시설등의 설치 및 관리, 소방용수시설 설치 및 보수, 시설비및부대비, 시설비

- 안전하고 안정적인 아리수공급, 맑은물길조성, 장기사용배급수관(350mm이하 정비), 시설비및부대비, 시설비

붙임  1. 변경내역서 및 변경합의서 각 1부.

2. 설계변경 심의결과 관련서류 각 1부.

3. 검증확인서 1부.  끝.

	행 정 지 원 과 장
주무관	박민용		시설관리팀장	김용섭		시설관리과장	권승계		서부수도사업소장	06/26
代김종은
협조자
시행	시설관리과-10600	(	2024. 6. 26.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 3층 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3697	/전송	02-3146-3739	/	bbbpmy@seoul.go.kr	/	부분공개(7)