문서번호	건축부-9710
결재일자	2024. 6. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		문화시설과장	건축부장
박영우		김선경	06/26
			代정채문
협 조

『서울 어울림체육센터 건립공사』

계약 변경 검토보고

2024. 6.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『서울 어울림체육센터 건립공사』

계약 변경 검토보고

「서울 어울림체육센터 건립공사」관련 내역조정 및 일시중지 기간 반영을 위한 계약 변경을 하고자 검토 후 보고드림

□ 공사개요

ㅇ 위    치 : 노원구 상계동 1268 (수락산역 환승주차장)

ㅇ 규    모 : 지하2층/지상3층, 연면적 14,779㎡(볼링장 32레인, 수영장 10레인 등)

ㅇ 공사기간 : ’22. 7. 25. ~ ’25. 8. 19.

ㅇ 도 급 액 : 26,535,221천원

ㅇ 시공사(코원건설 외1), 감리사(토문엔지니어링건축사사무소 외2), 설계사(자인 건축사사무소 외1)

ㅇ 공 정 률 : 35%(매트기초 타설 완료, 공사중지 중)

□ 변경계약 검토내용

ㅇ 관련 근거

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제9장 계약 일반조건 제7절 계약금액의 조정

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제97조(설계변경 관리)

- ‘서울 어울림체육센터 건립공사’ 공사중지 검토보고(건축부-8164, ’24.05.28.)

ㅇ 변경 사유

- 코원건설 공사포기로 법률 검토 등을 위해 1달간 공사 일시중지하였고, 이에 따라 준공기한 연기 필요(’24.5.28.(화) → ’24.6.27.(목), 31일간)

- *****************************************************************************

ㅇ 변경 내용

- 공사기간 변경

****	****	****	****
**	***********************	***********************	*****
**	***********************	***********************	****** *********

******************************************************

- 공사금액 변경

****	****	****	****
**	***************	***************	****
**	***************	***************	**************

ㅇ 특이사항

************************************************************************

□ 검토의견

ㅇ 책임건설사업관리기술자 검토의견

- 시공사에서 제출한 공기연장 사유 및 2차공사 내역변경에 따른 계약변경 요청을 검토한 결과, 적합하게 제출되었음

ㅇ 공사관리관 검토의견

- 책임건설사업관리기술자 검토의견이 적정하며, 계약부서로 통보하여
변경계약을 추진하고자 함

붙임: 1. 감리단 계약변경 검토 공문 1부.
2. 합의각서 1부.  끝.