문서번호	도시철도토목부-8095
결재일자	2024. 6. 27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		토목2과장	도시철도토목부장
김봉성		박형복	06/27
			윤병헌
협 조
	주무관			배상현

「진접선(4호선연장) 차량기지 2공구 건설공사」

휴(무)일 작업계획 검토보고(2024년 7월)

2024. 6.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

「진접선(4호선연장) 차량기지 2공구 건설공사」

휴(무)일 작업계획 검토보고(2024년 7월)

『진접선(4호선연장) 차량기지 2공구 건설공사』와 관련하여 2024년 7월 휴(무)일 작업계획 승인 요청에 대하여 검토보고 함.

※ 관련서류 : 서현감 차량기지2공구 2024-774호(2024. 6. 26.)

□ 관련근거

ㅇ 공사계약 일반조건 5절 6항(휴일작업과 야간작업)

ㅇ 공사계약 특수조건 제15조(휴일 및 야간작업)

ㅇ 건설사업관리 과업내용서 6.3 휴일 및 야간근무에 대한 건설사업관리대가 지급

- 야간근무는 주야간으로 산출된 공사비에 의거 건설사업관리대가를 산출하였으므로 추가 지급 제외

- 휴일근무는 필요시 적정인원을 배치하고 원인자가 건설사업관리대가 부담

□ 휴(무)일 작업계획

작업일	작업 행태	작업위치	작업내용	관리자
				감리단	시공사
7월 6일 (토)	휴무일	차량기지 (토목)	차량기지 0+400~800 절토부 깍기, 상차 운반 차량기지 토사 및 암성토 및 암소할 다짐 절토부 2-3 소단측구 및 산마루측구 철근 거푸집 설치 성토부 1-1 본선수로 철근 거푸집 설치 성토부 2-4 비탈수로, 소단측구 철근, 거푸집 설치 우수관로 설치 및 맨홀 인상 선간배수로 및 집수정 설치 성토부옹벽 1-1 보강토 블록쌓기 및 그리드 설치 절토부옹벽 2-3 패널 설치	***	*** *** *** *** *** *** *** *** ***
7월 13일 (토)	휴무일	차량기지 (토목)	차량기지 0+400~800 절토부 깍기, 상차 운반 차량기지 토사 및 암성토 및 암소할 다짐 절토부 2-3 소단측구 및 산마루측구 철근 거푸집 설치 성토부 1-1 본선수로 철근 거푸집 설치 성토부 2-2 본선수로 철근 거푸집 설치 성토부 2-4 비탈수로, 소단측구 철근, 거푸집 설치 우수, 오수, 폐수관로 설치 및 맨홀 인상 선간배수로 및 집수정 설치 성토부옹벽 1-1 보강토 블록쌓기 및 그리드 설치 성토부옹벽 2-3 보강토 블록쌓기 및 그리드 설치 절토부옹벽 2-3 패널 설치	***	** *** *** *** *** *** *** ***
7월 20일 (토)	휴무일	차량기지 (토목)	차량기지 0+400~800 절토부 깍기, 상차 운반 차량기지 토사 및 암성토 및 암소할 다짐 절토부 2-3 소단측구 및 산마루측구 철근 거푸집 설치 성토부 2-2 본선수로 철근 거푸집 설치 성토부 2-4 비탈수로, 소단측구 철근, 거푸집 설치 우수, 오수, 폐수관로 설치 및 맨홀 인상 선간배수로 및 집수정 설치 성토부옹벽 1-1 보강토 블록쌓기 및 그리드 설치 성토부옹벽 2-3 보강토 블록쌓기 및 그리드 설치 절토부옹벽 2-3 패널 설치	***	*** *** *** *** *** *** *** *** ***
7월 27일 (토)	휴무일	차량기지 (토목)	차량기지 0+400~800 절토부 깍기, 상차 운반 차량기지 토사 및 암성토 및 암소할 다짐 절토부 2-3 소단측구 및 산마루측구 철근 거푸집 설치 성토부 2-4 비탈수로, 소단측구 철근, 거푸집 설치 우수, 오수, 폐수관로 설치 및 맨홀 인상 선간배수로 및 집수정 설치 성토부옹벽 1-1 보강토 블록쌓기 및 그리드 설치 성토부옹벽 2-3 보강토 블록쌓기 및 그리드 설치 절토부옹벽 2-3 패널 설치	***	** *** *** *** *** *** *** ***

ㅇ 작업사유 : 공사의 연속성 확보 및 예정공정 추진

- 휴일근무는 필요시 적정인원을 배치하고 원인자가 건설사업관리대가 부담휴무일(토요일) 작업에 대해 대체휴무 실시, 휴일(일요일 및 공휴일) 작업 시 추가 비용은 시공사 부담

ㅇ 감리 근무계획 및 대체휴무 계획

구 분	근무일자	근 무 자	대체 휴무계획		비 고
			대체 휴무일	업무대행자
휴(무)일 근무 계획	********	***	********	***
	*********	***	********	***
	*********	***	********	***
	*********	***	*******	***

□ 건설사업관리단 검토의견

ㅇ 공정추진을 위해 차량기지 토공, 구조물(산마루측구, 소단측구 등), 절·성토부 옹벽공사 휴(무)일 추진은 타당함

ㅇ 공기지연 방지 및 창동차량기지 적기 이전을 위해 휴(무)일 작업을 시행하고 건설사업관리단 근무자에 대해서는 대체휴무를 시행코자 함

□ 조치계획

ㅇ 상기 건설사업관리단의 검토의견이 적정하다고 판단됨에 따라 아래와 같은 조건으로 2024년 7월 휴(무)일 작업계획에 대해 승인하고, 작업내용 등 변경사항 발생 시 사전보고 후 시행토록 조치하고자 함.

	승 인 조 건
◦ 작업 시 시공사 현장책임자는 관리자급으로 지정하고, 근무조 편성은 반드시 안전관리자를 포함하여 근무하도록 하여 안전사고예방 관리 철저 ◦ 중대재해처벌법 시행에 따라 산업재해 예방을 위한 자율점검표, 산재예방 매뉴얼 등을 적극 활용하여 先안전, 後작업 이행 철저 ◦ 위험성평가 실시 후 위험성 감소대책 이행 철저 ◦ 근로자 보호 기본사항 10대 항목 및 안전시공 기본사항 10대 항목을 준수하고 안전사고 발생 시 경미한 사항이라도 즉시 보고 ◦ 작업 시 신호수 배치 및 통행로 확보를 철저히 하여 시민 불편사항 최소화 ◦ 화재예방을 위해 지정장소 외 흡연금지, 위험물 보관소 및 가스용기 관리 철저 ◦ 건설기계·장비 또는 중량물 취급 작업시 건설사업관리기술자 확인 및 안전수칙 준수 철저 ◦ 풍수해대비 현장 안전관리 및 점검 철저 ◦ 휴일 작업에 따른 건설사업관리비는 시공사 부담, 휴무일 작업에 따른 건설사업관리단 근무자는 대체휴무 실시 ◦ 스마트 안전장비를 적극 사용하여 안전사고 발생 최소화

붙임 : 관련문서 1식.  끝.