문서번호	시설관리과-5086
결재일자	2024. 6. 27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설부장
김형준		소영신	06/27
			이유국
협조

- 2024년 한강공원 자전거도로 유지보수 공사 -

설계변경(1회) 보고

2024.  6.

미래한강본부

(시설관리과)

- 2024년 한강공원 자전거도로 유지보수 공사 -

설계변경(1회) 보고

『2024년 한강공원 자전거도로 유지보수 공사』관련 현장여건 및

민원에 따른 물량변경 사항 등이 발생하여 설계변경코자 함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2024년 한강공원 자전거도로 유지보수 공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2024. 3. 5 ~ 12. 31

○ 총공사비 :************

****************************************************************

○ 공사내용 : 아스콘 포장 115a,  콘크리트 포장 4a, 차선도색 2,050m 등

○ 공사업체 : *************

□ 설계변경 개요

○ 설계변경 사유 : 해빙기 점검, 민원 및 시설개선 공사에 따른 따른 신규 공종 및 공종별 보수물량 변경

- (점검정비) 해빙기 대비 자전거도로 및 하천시설 점검결과 일제정비

[시설관리과-2512호(2024.3.26.)]

- (시설개선) 난지한강공원 도로포장 정비계획 [시설관리과-4064호(2024.5.21.)] 등

○ 주요 변경 내역

공 종		단위	당초	변경	증•감
수량 변경	도로경계석 설치	m	***	*****	********
	아스팔트 절삭 및 덧씌우기(주간)	a	***	***	******
	콘크리트 포장	a	*	*	****
	측구수로관설치	m	***	***	******
	차선도색	m	*****	******	*********
신규 공종	PVC 접합	m	*	**	*****
	빗물받이 설치	주	*	*	****
	가드레일 철거	m	*	***	******

○ 직접공사비 변경내역

(단위:원)

공 종	구분	단위	재료비	노무비	경비	합계	증•감
1.토공	당초	1식	*********	**********	*********	**********	************
	변경		*********	**********	*********	**********
2. 구조물공	당초	1식	*********	**********	*********	**********	*************
	변경		**********	**********	*********	**********
3. 포장공	당초	1식	**********	**********	**********	***********	*************
	변경		**********	***********	**********	***********
4. 부대공	당초	1식	**********	***********	**********	***********	*************
	변경		**********	***********	**********	***********
5. 사급자재	당초	1식	*			*	*************
	변경		**********			**********

○ 설계변경(1회) 내역

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
총공사비	**************	*************	***
도 급 비	***********	**************	*************
관급자재	***********	************	*************
이 설 비	***********	************	*************

□ 조치계획

○ 상기와 같이 현장여건 및 민원에 따른 설계변경 사항을 반영코자 함

○ 변경 계약 시행

- ********************************************

- 예산과목

► 한강공원관리및운영, 한강공원 시설관리 및 개선, 자전거도로유지보수, 시설비및부대비, 시설비

붙임  1. 설계변경 자문위원회 심의결과 보고 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 검증확인서 1부.

4. 방침서 각 1부.  끝.