문서번호	정보공개담당관-13848
결재일자	2024. 6. 27.
공개여부	부분공개(2,5)
방침번호

			시 민
주무관		정보공개팀장	정보공개담당관
박영옥		이동판	06/27
			김순희
협조
	주무관		이유빈

2024년 정보소통광장·문서공개시스템 기능개선 및 유지관리 사업  부분준공검수 결과보고

2024. 6. 27.(목)

정보공개담당관

(정보공개팀)

2024년 정보소통광장·문서공개시스템 기능개선 및 유지관리 사업

부분준공검수 결과보고

2024년 정보소통광장 · 문서공개시스템 기능개선 및 유지관리 사업이 원활하게 진행됨에 따라 부분준공검수(사)를 실시하고자 함

1		사업개요

□ 사 업 명 : 2024년 정보소통광장·문서공개시스템 기능개선 및 유지관리

□ 사업기간 : 2024. 1. 1. ~ 12. 31.(12개월)

□ 계약업체 : ****

□ 계약금액 : ************

□ 주요 과업내용

ㅇ 정보소통광장 메인화면 디자인 개편

ㅇ 투자·출연기관 관리자 페이지 개편 및 기능 개발

ㅇ 결재문서 한번에 보기 서비스 신규개발

ㅇ 사용자별 부서 관리자 접근 권한 강화

ㅇ 위원회 관리시스템(기조실 구축)과 문서공개시스템 연계 기능 개발

ㅇ 문서공개시스템 서비스 메뉴 구조 개편

ㅇ 조직정보 수정 및 시스템 반영 배치 프로그램 개발(수동->자동)

ㅇ 전자정부 표준프레임워크 업그레이드

ㅇ **************** 안정적인 결재문서 공개

ㅇ 개인정보 노출 위험 문서 지속적인 육안 모니터링 실시

ㅇ 정보소통광장 페이스북 요일별 콘텐츠 제작·배포

ㅇ 정보소통광장 · 문서공개시스템 안정적 운영 및 유지관리

2		검수내용

□ 부분준공일자 : 2024. 6. 24.

□ 부분준공금액 : ************

(단위 : 원)

구 분		집행일자	금 액	집행율	비고
계약금액		*	***********		******************* ******************* ********************
부분 준공 금액	선금	******	***********	*****	******************* ******************* ********************
	집행액	******	***********	*****	******************** ******************** *********************
	소계		***********	*****	******************* ******************* *********************
집행잔액		*******	***********	*****	******************** ********************

□ 검 수 자

ㅇ 총  괄 : **********

ㅇ 담당자 : ******************

□ 부분준공내역

ㅇ 추진기간 : 2024. 1. 1. ~ 6. 24.

ㅇ 진 척 률 :***************************

ㅇ 기능개선 분야 주요내용

- 정보소통광장 결재문서 한번에 보기 서비스 신규개발 완료

- 정보소통광장 관리자 접근 권한 관리 기능 완료

- 투자출연기관 관리자 페이지 개발 및 기능개발 완료

- PDF변환 솔루션 설치 완료

- 전자정부 표준프레임워크 업그레이드 완료

- 문서공개시스템 서비스 메뉴 구조 개편 완료

- 정보소통광장 메인화면 위젯 모듈 형태 개편 진행중

- 조직정보 수정 및 시스템 반영 프로그램 개발 화면 설계 진행중

- 결재문서 직위명 관리 기능 개발 화면 설계 진행중

- 위원회 관리시스템과 문서공개시스템 연계 기능 개발 진행중

ㅇ 유지관리 분야 주요내용

(’24.1.1. ~ 6.24., 단위 : 건)

구분	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월
발생	72	14	11	21	12	9	5
완료	68	14	11	21	12	8	2
진행	4	0	0	0	0	1	3

-********************************

-***********************************

- 정보소통광장 사전공개 항목 수정(개방형 타입만 업로드가능)

- 투자출연기관 결재문서 등록·연계 위한 시스템 유지운영 및 모니터링

·투자출연기관 문서 오류 분석 및 오류 관련 가이드 지원

·투자출연기관*************** 자동연계 지원

- *****************************

- 행정정보 콘텐츠 제작(주간) 및 페이스북 게시

- 정보소통광장·문서공개시스템 상용SW 및 응용SW의 안정적 운영 및 유지관리

- ***********************

ㅇ 인력투입현황

(단위 : M/M)

구분	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계획	93.00	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75
실투입	43.40	7.75	7.75	7.75	7.75	7.75	6.60
투입율	47%	100%	100%	100%	100%	100%	86%
연간계획	100%	8%	17%	25%	33%	42%	50%	58%	67%	75%	83%	92%	100%

붙임  1. 월간보고서 및 주간보고서 각 1부.

2. 선금정산내역서 및 증빙자료 각 1부.  끝.