문서번호	시설관리과-10681
결재일자	2024. 6. 26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
김태형		오영진	06/26
			조임남
협조

「2023년 동작구 관내 상수도공사 외 2건 재해예방 기술지도용역(장기계속)」

설계변경 검토

2024.  6.

남부수도사업소

(시설관리과)

「2023년 동작구 관내 상수도공사 외 2건 재해예방 기술지도 용역(장기계속)」

설계변경 검토

건설재해예방 기술지도 용역 시행 중 현장 여건에 따른 물량 감소가 발생됨에 따라 설계변경을 시행하여 용역수행에 만전을 기하고자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명: 2023년 동작구 관내 상수도공사 외 2건 재해예방 기술지도 용역(장기계속)

***************************

**********************

************************************************************

○ 용역내용: 재해예방기술지도 ***

□ 설계변경 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

- 설계변경으로 인한 계약금액 조정

□ 설계변경 사유 및 내용

○ 변경사유: 용역 시행 중 공사현장 여건 변화에 따른 물량 감소 발생

○ 물량 변경(기술지도 수량)

구분	당초	변경	증감	비고
총차수	59회	52회	감) 7회
1차수	33회	33회	-
2차수	26회	19회	감) 7회

○ 계약금액 변경

(단위: 원)

구분	당초	변경	증감액	비고
총차수	15,089,800	13,626,800	감) 1,463,000
1차수	8,161,450	8,161,450	-
2차수	6,928,350	5,465,350	감) 1,463,000

□ 처리의견

○ 상기와 같은 변경사항을 반영하여 설계변경 계약의뢰코자 함

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.