문서번호	토목부-12962
결재일자	2024. 6. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
송진수		이성주	06/27
			이임섭
협조
	주무관		김경수

실정보고(교량기초부 도장공종적용) 검토보고

- 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사 -

2024. 6.

도시기반시설본부

(토      목      부)

- 창동상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사 -

실정보고(교량기초부 추가 공종적용) 검토보고

창동-상계 동서간 연결교량 건설공사 디자인 심의결과 반영을 위해 교량기초 구조물 도장에 대한 실정보고 검토결과 및 조치계획을 보고 드림

※ 관련근거 : 실정보고 검토보고(창동상계 제24-137호, 2024. 6. 26.)

□ 공사 개요

ㅇ 공 사 명  : 창동 상계 동서간 연결교량 건설공사

ㅇ 공사규모  : 보차도교 신설(B=32.0m,  L=118.0m), 보행교 신설(B=10.5m,  L=110.5m)

ㅇ 사업기간  : '21. 4. 19. ∼ '25. 5. 31.

ㅇ 총공사비  : 보차도교 22,500백만원/ 보행교 14,915백만원

ㅇ 시  공  사  : 보차도교 하웅종합건설(주) 외 1개사/ 보행교 청광건설(주) 외 1개사

ㅇ 건설사업단 : ㈜동해종합기술공사 외 2개사

□ 추진 경과

ㅇ ′20. 06. 30 : 창동상계 동서간 연결교량 건설 기본 및 실시설계 설계심의

ㅇ ′20. 10. 16 : 창동상계 동서간 연결교량 디자인 심의(공공디자인진흥위원회)

ㅇ ′21. 04. 19 : 공사착공

ㅇ ′23. 03. 20 : 연결교량(보행교, 보차도교) 하부 콘크리트 구조물 타설완료

ㅇ ′23. 07. 13 : *************************************************

□ 실정보고 검토

*******************************

- ***********************************************

- ******************

ㅇ *********************

************

**********************************************************

ㅇ 건설사업단 의견

- *************************************************************************************

ㅇ 주요수량 증·감 내역

*****	**	보차도교	보행교	합계		***
******	*	*****	***	**	*****
*********	*	*****	***	**	*****
*****	*	*****	***	**	*****
*********	***	*****	***	**	*****

ㅇ 공사비 증·감

(단위: 천원)

*******	****	***	****		***
*******	******	******	**	******
***	******	******	**	******
****	*******	******	**	*******
*****	******	*****	**	******
****	*******	******	**	*******

□ 검토결과 및 조치계획

ㅇ 서울시 디자인 심의결과를 반영하기 위한 건설사업단의 검토의견은 적절한 것으로 판단되며 향후 설계변경에 반영하고자 함.

붙임 : 건설사업관리단 실정보고 검토보고서 1부.  끝