아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경 시행에 따른 계약의뢰(2023년 서대문구 관내 상수도공사)

우리사업소에서 시행 중인 『2023년 서대문구 관내 상수도공사』 와 관련하여 다음과 같이 설계변경 계약의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 공  사  명: 2023년 서대문구 관내 상수도공사(장기계속단가계약)

2. 계약상대자: **************

3. 계약  기간: 2023. 07. 03.~2024. 6. 30.

4. 설계변경 현황

(단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증·감
총 공사비		*************	*************	**********
도급비	1차(2022년)	***********	***********	*
	2차(2023년)	***********	***********	**********
	총 차	*************	*************	**********
관급자재비		***********	***********	*
도로복구비 및 기타		***********	***********	*

5. 설계변경 사유: 신규공종 및 시공에 따른 물량 증․감 발생

6. 1회 최대 이행금액: *************

7. 예산과목:

가. 물전문기관역량강화,세입증대및시민편익증진,급수공사,신설공사비

나. 안전하고안정적인아리수공급,무단수급수체계구축,상수도블록시스템공급체계구축,시설비

다. 안전하고안정적인아리수공급,무단수급수체계구축,소블록배급수관망개선,시설비

라. 안전하고안정적인아리수공급,시설물관리최적화,배급수관신설및연결,시설비

마. 안전하고안정적인아리수공급,맑은물길조성,대형상수도관세척,수선유지비

바. 안전하고안정적인아리수공급,세계최고수준의유수율유지관리,상수도관누수복구,수선유지비

사. 안전하고안정적인아리수공급,맑은물길조성,노후밸브정비,시설비

아. 안전하고안정적인아리수공급,맑은물길조성,장기사용송배수관정비,시설비

자. 안전하고안정적인아리수공급,맑은물길조성,장기사용배급수관정비,시설비

차. 소방용수시설관리,소방용수시설등의설치및관리,소방용수시설설치,시설및부대비

카. 소방용수시설관리,소방용수시설등의설치및관리,소방용수시설보수,시설및부대비

붙임  1. 설계변경 관련 서류 각 1부.

2. 합의서 1부.

3. 설계변경 시행 공문 1부.  끝.

	급 수 운 영 과 장
주무관	김동하		급수운영팀장	代김기문		급수운영과장	06/26
채재일
협조자
시행	급수운영과-11677	(	2024. 6. 26.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 서부수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3673	/전송	02-3146-3689	/	hea39999@seoul.go.kr	/	부분공개(5)