문서번호	기전과-8160
결재일자	2024. 6. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
김채연		06/27
		代김진종
협 조

「지하차도 노후 분전반 교체공사」 준공 설계변경 검토보고

「지하차도 노후 분전반 교체공사」

준공 설계변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 6.

서부도로사업소

(기  전  과)

「지하차도 노후 분전반 교체공사」

준공 설계변경 검토보고

「지하차도 노후 분전반 교체공사」의 작업 완료에 따른 물량 변경 및 제경비 정산을 반영한 준공 설계변경 검토보고를 아래와 같이 보고드림.

Ⅰ		추 진 근 거

ㅇ 변경계약요청 -「지하차도 노후 분전반 교체공사」

(기전과 - 7975호, 2024. 6. 27.)

Ⅱ		공 사 개 요

ㅇ 공 사 명 : 지하차도 노후 분전반 교체공사

ㅇ 계약금액 : ***************************

ㅇ 계약기간 : 2024. 5. 1. ~ 2024. 6. 30.

ㅇ 계 약 일 : 2024. 4. 29.

ㅇ 계약상대자 : *********************

ㅇ 주요 과업내용

- 지하차도 조명용 옥외형 분전반 6면 및 옥내형 분전반 2면 설치

- 기타 부대공사

Ⅲ		변 경 사 항

□ 주요 변경내용

****************

공종명	단위	수량		변경예산[원]	(증)/(감)	변경사유
		전	후
*****	*			********	***	***********
*********	*			*******	***
*****	*			********	***
*******	*			********	***

**************

**************************************************************************

공종명	규격	단위	수량		변경예산[원]	(증)/(감)
			전	후
*********	******* *******	*	*	**	********	***

□ 변경금액                                       [단위 : 원]

구 분	기 존(a)	변 경 후(b)	변경금액(b-a)
****	**********	**********	********************
****	**********	**********	********************
*****	*********	*********	********************
*	**********	**********	********************

Ⅳ		보고자의견

ㅇ 물량 변경 및 제경비 정산을 반영한 설계변경이 타당하다고 판단되며, 상기 보고 사항에 따라 계약변경을 추진하고자 함.

Ⅴ		향 후 계 획

ㅇ  2024. 6. 27. : 준공 설계변경 시행 및 공사 준공

붙임  1. 설계변경공문 1부.

2. 변경내역서 1부.
3. 합의각서 1부.
4. 검증확인서 1부.  끝.