아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	구의아리수정수센터
수신	정수과장
(경유)
제목	용역 변경 계약 체결 통보[구의아리수정수센터 사업장폐기물(무기성 정수오니) 처리 용역]

1. 정수과-2930(2024.6.25.)호와 관련입니다.

2. 용역 변경 계약을 체결하고 아래와 같이 그 결과를 통보합니다.

가. 건    명: 구의아리수정수센터 사업장폐기물(무기성 정수오니) 처리 용역-2차수

나. 계약상대자: 한일시멘트주식회사 [대표: 전근식] 외 1 서울특별시 서초구 효령로 275

다. 변경 내역

1) 계약기간: 당초 2024.6.30. → 변경 2024.7.31.

2) 계약금액

- 총차: 당초 810,786,790원 → 변경 874,401,990원 [증 63,615,200원]

- 금차: 당초 397,595,000원 → 변경 461,210,200원 [증 63,615,200원]

3) 변경사유: 2024년도 용역계약 지연

라. 변경계약일자 : 2024.6.26.

붙임  1. 변경계약서 1부.

2. 변경계약관련서류 1식.  끝.

	행 정 관 리 과 장
주무관	김동석		행정관리과장	06/26
代한미경
협조자
시행	행정관리과-6532	(	2024. 6. 26.	)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 광나루로 571, 구의아리수정수센터 행정관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5413	/전송	02-3146-5409	/	dsmad@seoul.go.kr	/	부분공개(5)