아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	영등포아리수정수센터
수신	정수시설과장
(경유)
제목	변경계약체결[1정수장 배슬러지 교반기 교체] 보고 및 통보

1. 정수시설과-6973(2024.06.26.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 아래와 같이 변경계약체결 되었음을 보고합니다(알려드립니다).

가. 건   명 : 1정수장 배슬러지 교반기 교체

나. 변경사유 : 보험료 정산

다. 계약업체 : (주)우진

라. 변경내역

당 초			변 경
계약체결일	계약기간	계약금액(원)	변경계약 체 결 일	계약기간	계약금액(원)
2024.04.22.	2024.04.22.~ 2024.09.19	70,400,000	2024.06.27.	2024.04.22.~ 2024.09.19	69,912,000

붙임  1. [2024.4.1지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부예규 제282호) 1부.

2. 물품변경계약서 1부.

3. 변경내역서 1부.

4. 합의서 1부.

	영등포아리수정수센터소장
주무관	박소현		행정관리과장	김성수		영등포아리수정수센터소장	06/27
代김성수
협조자
시행	행정관리과-8363	(	2024. 6. 27.	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로, 11 영등포아리수정수센터	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5611	/전송	02-3146-5691	/	number0917@seoul.go.kr	/	부분공개(5)