아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	준공 설계변경 시행 및 계약변경 의뢰 - 23/24년 도로기전시설물 유지보수공사 (연간단가 - 2차)

우리 사업소에서 시행 중인 「23/24년 도로기전시설물 유지보수공사 (연간단가 - 2차)」건에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 하오니 검토 후 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명: 23/24년 도로기전시설물 유지보수공사 (연간단가 - 2차)

나. 공사업체: 배선엔지니어링 (대표 이춘배)

다. 공사기간: (2차) '24.1.1. ~ '24.6.30.    /  (총차) '23.7.1. ~ '24.6.30.

라. 계약금액: (2차) 금154,032,100원  /  (총차) 금301,732,100원

마. 변경사유: 준공에 따른 물량 변경, 보험료 정산 등

바. 변경사항

구분	당초(원)	변경(원)	증감액(원)
1차 (준공) ('23. 7. ~ 12.)	147,700,000	147,700,000	-
2차 ('24. 1. ~ 6.)	154,032,100	158,380,000	증) 4,347,900
총차(=1차+2차)	301,732,100	306,080,000	증) 4,347,900

사. 예산과목 :  서부도로사업소 기전과, 도로시설물 개선, 도로 기전시설물 개선,
도로기전시설물 일상유지보수, 시설비및부대비, 시설비
(예산편성부서 : 재난안전관리실 재난안전정책과)

붙임  1. 검토보고 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 합의각서 1부.
4. 제비율검증서 1부.  끝.

	기 전 과 장
주무관	곽영두		주무관	유철희		기전과장	06/27
代김진종
협조자
시행	기전과-8169	(	2024. 6. 27.	)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203, 서부도로사업소 (상암동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8395	/전송	02-300-8410	/	youngdoo@seoul.go.kr	/	부분공개(5)