문서번호	시설관리과-11437
결재일자	2024. 6. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
서울	김재영	06/27
		임인택

설계변경 심의회 개최 결과 보고

(2023년 서초구 관내 급수공사 등 건설폐기물 처리용역(장기계속))

2024. 6.

시설관리과

설계변경 심의회 개최 결과 보고

2023년 서초구 관내 급수공사 등 건설폐기물 처리용역(장기계속)

『2023년 서초구 관내 급수공사 등 건설폐기물 처리용역(장기계속)』에 대한 설계변경 심의회를 개최하고, 그 결과를 보고 드림.

심의회 개최 결과

❍ 심의회 개최 개요

- 용 역 명: 2023년 서초구 관내  급수공사 등 건설폐기물 처리용역(장기계속)

- 일    시: 2024. 6. 27.(목) 10:30

- 심의내용: 설계변경 적정성 여부

- 심의위원: 위원장(시설관리과장), 위원(******************)

❍ 심의회 개최 결과: 적정함

설계변경 사유 및 주요 세부내용

❍ 설계변경 근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

❍ 설계변경 사유

- 각 공사 현장의 여건 변동에 따른 공종별 계약물량 증•감 사항 발생

- 2차 계약금액 변경에 따른 각 차수별 부기금액 변경

❍ 주요 세부내용

- 건설폐기물 운반, 처리 증․감 현황

구분	운 반(㎥)						처 리(톤)						비고
	총차		1차		2차		총차		1차		2차
	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경
폐아스팔트	***	***	***	***	***	***	*****	*****	***	***	***	*****
폐콘크리트	***	***	**	**	***	***	*****	***	***	***	*****	***
폐토석	***	**	**	**	***	**	***	**	**	**	***	**
혼합건설폐기물	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
계	*****	*****	***	***	*****	***	*****	*****	***	***	*****	*****

설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분		당초 금액	변경 금액	증 ․ 감
총부기금액		***********	***********	***********
	1차 부기금액	**********	**********	*
	2차 부기금액	**********	**********	***********

조치계획

❍ 심의회 의견을 반영하여 설계변경 시행 및 변경계약 의뢰코자 함

붙임 1. 설계변경 심의 사유서 1부.

2. 설계변경 심의 의견서 1부.

3. 설계변경내역서 1부.  끝.