문서번호	치수과-4857
결재일자	2024. 6. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	치수과장
박지수	06/27
	김창신

한강 준설공사 재해예방 기술지도용역

정산 설계변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 6.

미래한강본부

(시설부)

한강 준설공사 재해예방 기술지도용역

정산 설계변경 검토보고

「한강 준설공사 재해예방 기술지도용역」정산 설계변경에 대하여 검토하여 처리계획을 보고 드림

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명 : 2023년 한강(저수로, 취수장 주변) 재해예방 기술지도 용역

ㅇ 과업기간 : 2023.10.11 ~ 2024. 6. 30까지

ㅇ 계약금액 : 8,151,000원

ㅇ 용 역 사 : 제일건설안전기술(주) 대표 황선필

ㅇ 과업내용 : 재해예방 기술지도 26회(월2회)

- 2023년 한강 취수장 주변 준설공사 : 8회

- 2023년 한강 저수로 준설공사 : 18회

□ 설계변경 내용

ㅇ 변경사유 : 공사 준공 도래에 따른 월간 기술지도 횟수 정산

ㅇ 수량 증·감 현황

구 분	규 격	단위	변 경 현 황
			당 초	변 경	증·감
계		회	26	21	감)		5
취수장 주변 준설공사	재해예방 기술지도	회	8	8	-
저수로 준설공사	재해예방 기술지도	회	18	13	감)	5

ㅇ 용역비 증·감 현황                                                 (단위 : 원)

****		***	***	***
***	*******	*********	*********	****	*********
	*****	********	*******	****	*******
	*	***********	*********	****	*********

□ 조치계획

ㅇ 준설공사 준공에 따라 재해예방 기술지도 횟수 조정하여 설계변경

ㅇ 설계변경 시행 및 변경계약 의뢰(치수과 → 총무과)

붙임 : 변경합의서 1부.  끝.