문서번호	치수과-9814
결재일자	2024. 6. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호	부구청장 제332호

주무관		치수팀장		치수과장		안전건설교통국장		부구청장
전현철		오상호		민병기		신용철		전결 06/28
								유보화
협조
	기획재정국장		어용경
	재무과장		나재진
	계약팀장		유보현

제2회 설계변경 추진계획[2024년 하수관로 준설(물청소)공사(단가계약)]

「2024년 하수관로 준설(물청소) 공사(단가계약)」 제2회 설계변경 추진계획

2024. 6.

(안전건설교통국 치수과)

「2024년 하수관로 준설(물청소) 공사(단가계약)」

제2회 설계변경 추진계획

기상이변에 따른 집중호우 대비 침수피해 예방을 위한 긴급준설비가 재배정됨에 따라 설계변경(제2회) 계획을 보고 드림.

□ 관련근거

○ 하수관로 긴급준설비 예산재배정 알림(물재생계획과-9373, '24.6.13.)

□ 공사개요

************************************

********************************

****************************

*************************************************

**************************************************

*****************************************

□ 추진경과

○ 2024. 2.27.      공사계약 및 착공

○ 2024. 5.27.      설계변경(1회)

- 여름철 수해 대비와 하수악취 민원해소를 위한 물량 증·감에 따른 변경

○ 2024. 6.13.      하수관로 긴급준설비 예산재배정 알림 … 450백만원

□ 보고내용

○ 여름철 집중호우 대비 주택가 및 음식점 밀집지역, 유수지 유입암거 준설 시행

- 시비 예산(450백만원) 확보에 따라 우기 전 유수지 유입암거 및 하수관로 준설을 실시하여 침수 피해를 예방하고자 함

**********

******	******	******	*****
****	***********	*************	*	***********
*****	***********	*************	*	***********
*****	**********	**********	*

***********

****	****	**	****		***
			**	**
****	*****************	*	***	***	*	***
***	***********	*	******	******	*	******

□ 조치계획

○ 수해예방 및 현장여건을 고려한 공종간 물량 증·감사항을 반영하여 설계변경을 시행하고, 향후 실물량 정산처리코자 함.

붙임  1. 변경내역서 1부.

2. 제비율검증확인서 1부.

3. 일상감사 의견서 1부.

4. 하수관로 긴급준설비 예산재배정 알림 1부.  끝.