문서번호	정보통신과-9331
결재일자	2024. 6. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		통신보안팀장		정보통신과장		스마트포용도시국장
강민석		지미희		배경득		06/28
						이정희
협조

준공 및 정산 보고(송정동 행복가득 플랫폼 건립 통신공사)

준공 및 정산 보고 송정동 행복가득 플랫폼 건립 통신공사

2024. 6.

(정보통신과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [√] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [ ] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [ ] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
데이터기반행정고려사항		데이터활용 [ ] 지표관리대상 [ ] 기타 [ ]( 분석협조 등 기타 ) 미해당 [ ] ( ) ※ 데이터기반행정 미해당시 간결하게 사유를 기재하시기 바랍니다.
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [ ] 환경영향 [ ] 안전 [ ] 유지비용 [ ] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	서울시	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
구민의견 수렴		●	방법	:	설문조사 [ ] 만족도 조사 [ ] 찬반투표 [ ] 기타 [ ]
		●	시기	:	시행 전 [ ] 시행 중 [ ] 시행 후 [ ]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [ ]
	● 홍 보 제 목:
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

준공 및 정산 보고(송정동 행복가득 플랫폼 건립 통신공사)

「송정동 행복가득 플랫폼 건립 통신공사」와 관련하여 준공검사를 실시하고 그 결과를 보고함
	ㅊ

Ⅰ		추진근거

□ 송정동 행복가득 플랫폼 건립계획(변경)(지속발전도시과-5764호, '23.7.31.)

□ 준공검사원 지정요구 및 검사의뢰서(재무과-21826호, '24.6.24.)

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명: 송정동 행복가득 플랫폼 건립 통신공사

□ 위    치: 성동구 송정동 73-594(지상4층, 연면적 213.11㎡)

*****************************************

******************************************************

*******************************************************

□ 공사기간: 2022. 11. 14. ~ 2024. 6. 21.

Ⅲ		추진경위

□ '21. 09. 23.  송정동 행복가득 플랫폼 건립계획 방침 수립

□ '22. 08. 30.  설계용역 준공

□ '22. 11. 14.  공사착공

□ '23. 07. 31.  송정동 행복가득 플랫폼 건립계획(변경)(지속발전도시과-5764호)

□ '24. 05. 30.  공기연장

□ '24. 06. 20.  설계변경(1차)

□ '24. 06. 21.  공사준공

Ⅳ		준공검사 및 정산

□ 검사일자: 2024. 6. 26.(수)

□ 검사방법: 계약서, 설계도면, 시방서 등 시공상태 확인

*********************************

□ 검사결과: 시방서의 요구사항대로 적합하게 시공되었음

□ 준공금액                                               (단위: 원)

도급금액	관급자재	총공사비
**********	**********	***********

□ 경비정산                                               (단위: 원)

구분		계약금액	준공금액	증빙금액	비고
경비	산재보험료	*********	*********	*********	완납증명원
	고용보험료	*******	*******	*******	완납증명원
	산업안전 보건관리비	*********	*********	*********	사용내역서, 세금계산서

Ⅴ		처리의견

□ 상기 검토 내용에 따라 재무과로 준공검수조서 제출하고자 함

붙임  1. 준공내역서 1부.

2. 준공사진첩 1부.

3. 준공도면 1부.

4. 보험료 납부 증빙 각 1부.

5. 산업안전보건관리비 사용 증빙 및 정산 검토결과서 1부.  끝.