문서번호	문화정책과-5174
결재일자	2024. 4. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시민문화팀장	문화정책과장
정민호	이호경	04/03
		김규리

서울광장 수목 이식공사 계약변경 계획

2024. 4.

문 화 본 부

(문화정책과)

서울광장 수목 이식공사 계약변경 계획
’24. 4. 3.(수)	문화정책과장 : 김규리☎2133-2510 시민문화팀장 : 이호경☎2540 담당 : 정민호☎2542

서울광장 상설무대 상시 전력공급 공사 일정에 맞춰 수목 이식공사를 진행하고자 준공기한을 연기하고자 함

□ 계약개요

ㅇ 계 약 명 : 서울광장 수목 이식공사

ㅇ 과    업

- 교목이식 : 서울광장 내 수목 3그루 남산공원으로 이식

- 관목이식 : 전선 지중화에 따른 서울도서관 동측 화단 관목이식 후 복구

ㅇ 계약상대 : 아라조경 주식회사(대표 이석우)

ㅇ 계약기간 : 2024. 3. 25. ~ 4. 3.

*********************

□ 계약변경 계획

*****************

***********************************

*************************************

**************************************************************************

□ 향후계획

ㅇ 계약변경 요청(재무과)	: ’24. 4. 3.(수)

ㅇ 관목이식	: ’24. 4. 6.(토) ~ 4.14.(일) 중

ㅇ 계약준공	: ’24. 4. 19.(금).  끝.