문서번호	총무과-10101
결재일자	2024. 7. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
청사팀장	총무과장	경영관리부장		서울아리수본부부본부장
곽대근	박은섭	안병희		07/01
				박진순
협 조
	기획예산과장		문병기
	재무회계과장		공미순
	기전설비과장		윤양호
	공간정보과장		한현숙

통합정보운영실 개선공사 발주계획

2024. 6. .

아리수본부

(경영관리부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

통합정보운영실 개선공사 발주계획

경영관리부장 :안병희☎3146-1101 총무과장 : 박은섭☎1110 담당 :곽대근☎1131

통합정보운영실을 개선하여 수운영 상황실 및 내·외빈 방문시 아리수  홍보를 위한 브리핑룸 등 다목적 공간으로 활용하고자 함.

Ⅰ		추진배경 및 현황

□ 추진배경

ㅇ 아리수 운영현황을 내외빈 방문시에 홍보할 수 있는 공간으로 활용

- 상수도 인프라 소개에 효율적인 시스템들이 통합정보운영실에 설치되어 있어, 이를 활용해 효과적인 브리핑 공간으로 활용할 수있도록 개선이 필요

ㅇ 통합정보운영실 내 GIS 유지보수실 이전 필요

- 보안관련 규정상 GIS유지보수실은 ‘출입통제공간’으로 분리 운영 필요

□ 통합정보운영실 현황

ㅇ 운영현황

- (시스템) GIS, 제어데이터 수집 및 영상정보 연계, 수질감시, 유량감시, 수운영정보 등

- (유지보수) 각 시스템 용역사 직원의 상주 및 비상주로 정기 및 수시 유지보수 진행

- (주요시설) 네트위크 감시, 제어데이터, 영상, 유량, 수질 모니터링 PC, 멀티비전, 회의테이블 등

GIS 용역사 상주	멀티비전(2×2)	회의테이블 및 유지관리 PC

Ⅱ		그간 추진현황

□ 통합정보운영실 개편 계획수립(공간정보과, 23.10.)

□ GIS 유지보수용역 보안강화를 위해 이전(총무과, 23.12.)

ㅇ 지상 1층 통합정보운영실에서 지하 1층 독립공간으로 이전

□ 통합정보운영실 개선을 위한 합동회의(2회, 24.5.~6.)

ㅇ 총무과 : 리모델링관련 발주(건축, 전기, 사무가구, 영상감시시스템)

ㅇ 공간정보과 : 공사 중 수운영, CCTV, 원격감시시스템 등 운영 협조

ㅇ 급수운영과 : 공사 중 수질관리시스템 운영 협조

ㅇ 전산정보과 : 공사에 따른 행정망, 전화 등 변경설치 협조

Ⅲ		추진계획

□ 추진방향

ㅇ 실시간 수운영 상황실 및 아리수 정책 홍보 기능을 위한 공간 재배치 및 리모델링

변경(전)	변경(후)

- 운영시스템과 운영자가 많은 반면 사무공간은 좁아 □자로 배치하여 운영해왔으나, GIS용역을 지하로 이전하면서 사무공간이 넓어짐에 따라

- 수운영 상황실 및 홍보 브리핑룸으로 활용하기 위해 멀티비젼을 정면에서  볼 수있도록 사무공간을 횡으로 배치하고

- 사무공간 2열과 3열은 화면을 볼때 1열과 간섭이 발생하지 않토록 바닥면을 높여(약 15cm) 개선하고

- 통합정보운영실에 내·외빈이 앉을수 있는 벤치형 소파를 우측에 설치하고

- 조도가 낮은 조명을 밝게 교체하여 근무자의 불편을 해소함

ㅇ 멀티비전 확장(4면→8면) 및 콘트롤러 구축하여 시인성 강화

- 멀티비전 (4면→8면) 확대하여 시인성 확보하고

- 분야별 감시시스템(원격감시, 수질감시 등)의 신속한 화면 표출 및 상황에 맞는 화면구성 시나리오를 적용하여 홍보기능을 강화함

□ 발주계획

ㅇ 통합정보운영실 개선공사(건축)

- 사 업 명 : 통합정보운영실 개선공사(건축)

**************

*****************************************

***************************************

************************

- 공사기간 : 착공일로부터 29일

- 예산과목 : 물 전문기관 역량강화, 행정 운영 효율화 및 직원만족도 제고, 행정장비 확충 및 청사 환경개선, 시설비 및 부대비, 시설비(건물)

- ***********************************************

ㅇ 통합정보운영실 개선공사(전기)

- ************************

- ************

- ************************************

***********************************

- ***********************

- 공사기간 : 착공일로부터 29일

- 예산과목 : 물 전문기관 역량강화, 행정 운영 효율화 및 직원만족도 제고, 행정장비 확충 및 청사 환경개선, 시설비 및 부대비, 시설비(건물)

- ******************************************

ㅇ 통합정보운영실 영상감시장치 제작구매 설치(조달)

- **********************************

- *************

****************

***********************************************

- 예산과목 : 물 전문기관 역량강화, 행정 운영 효율화 및 직원만족도 제고, 행정장비 확충 및 청사 환경개선, 시설비 및 부대비, 시설비(기계장치)

************************************

ㅇ 통합정보운영실 사무용 가구구매(조달)

- ****************************

- ***********

- ***********

- 예산과목 : 물 전문기관 역량강화, 행정 운영 효율화 및 직원만족도 제고, 행정장비 확충 및 청사 환경개선, 자산취득비 등, 자산 및 물품취득비(공기구비품)

- ****************************************

Ⅳ		특정제품선정 심사위원회

*********************************

***************

*************************************

*************************

**************

**************

*******************************************

*********************************************

*****************************************************************************************

************************************

***

***********

********************************************************************************

Ⅴ		행정 사항

□ 공사 및 물품구매에 대해 내역서 및 시방서 등을 작성하여 본부 재무회계과에 계약의뢰

□ 특정제품 선정 심사 후 외부 심사위원 수당 지급

붙임 : 1. 통합정보운영실 개편 계획 1부.

2. 특정제품 선정 심사요청서 1부.

3. 영상감시장치 제품 비교표 1부.

4. 심사위원 검토서(양식) 및 청렴서약서 1부.  끝.