문서번호	환경녹지과-3177
결재일자	2024. 7. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	환경관리팀장	환경녹지과장	서부공원여가센터소장
정동열	윤희권	강병기	07/01
			신현호
협 조
	공원운영과장		강종희
	운영팀장		고봉채

2024년 월드컵공원 위험수목제거공사 실정 및 설계변경 검토보고

2024. 06.

서부공원여가센터

(환경녹지과)

2024년 월드컵공원 위험수목제거공사 실정 및 설계변경 검토보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

우리 센터「2024년 월드컵공원 위험수목제거공사」와 관련하여 현장여건에 따른 수목 규격별 물량변경 사항이 발생하여 다음과 같이 설계변경하고자 보고 드림.

Ⅰ		공사개요

ㅇ 공 사 명 : 2024년 월드컵공원 위험수목 제거 공사

ㅇ 위    치 : 서울시 마포구 상암동 1535 일대

ㅇ 사업내용 : 위험수목 107주 제거

ㅇ 공사기간 : 2024. 03. 07. ~ 2024. 11. 30.

****************************

**********************

Ⅱ		실정 및 설계변경 검토보고

□ 위험수목 제거 물량 규격별 수량 증감 발생

ㅇ 증감현황

(단위 : 주)

구 분	규 격	변 경 전	변 경 후	비고(증감)
위험수목	B22	6	36	증 30
	B24	8	26	증 18
	B26	17	20	증 3
	B28	36	10	감 26
	B30	20	8	감 12
	B35	12	13	증 1
	B40	8	10	증 2
	계	107	123

*********

****************************************************************************************************************

□ 규격별 수량 변경에 따른 임목폐기물량 증

ㅇ 변경물량 : 당초 29.87ton → 31.60ton, 증 1.73ton

ㅇ 변경사유 : B22·24·26·35·40 규격 수목이 총 54주 증가하고, B28·30 수목 총 38주가 감소함에 따라 임목폐기물처리 물량 증가

ㅇ 규격별 임목폐기물처리 물량 현황

(단위 : 주, ton)

구 분	규 격	변 경 전		변 경 후		비고(증감)
		수량	폐기물량	수량	폐기물량
위험수목	B22	6	1.07	36	6.44	증5.37
	B24	8	1.43	26	4.65	증3.22
	B26	17	4.13	20	4.86	증0.73
	B28	36	8.75	10	2.43	감6.32
	B30	20	4.86	8	1.94	감2.92
	B35	12	4.56	13	4.94	증0.38
	B40	8	5.07	10	6.34	증1.27
	계	107	29.87	123	31.60	증1.73

□ 건강보험료·연금보험료 등 제경비 변경

ㅇ 규격별 물량 변경에 따른 간접노무비 등 제경비 정산

- 간접노무비·산재보험료·고용보험료·기타경비·일반관리비·이윤 등 감

□ 설계변경에 따른 변경금액 : 없음

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
도 급 액	38,500,000	38,500,000	-

□ 위험수목 제거 추진현황

ㅇ 1차 작업

- 지시일자 : 2024. 04. 04.

- 작업기간 : 2024. 04. 09. ~ 04. 17.

- 작업위치 : 센터 부설주차장 주변 녹지대

- 작업수량

(단위 : 주)

구 분	규 격	작업지시	실작업량	비고(증감)
위험수목	B22	6	6	-
	B24	6	6	-
	B26	-	-	-
	B28	1	1	-
	B30	2	2	-
	B35	1	8	증 7
	B40	1	3	증 2
	계	17	26	증 9

※ 실작업량 증가사유 : 현장여건에 따라 밀식되고 피압되어 지장이 있는 수목 추가 제거가 필요하여 작업당시 현장지휘 공무원********** 판단하에 제거물량 9주 추가작업 시행

ㅇ 2차 작업

- 지시일자 : 2024. 06. 10.

- 작업기간 : 2024. 06. 10. ~ 06. 14.

- 작업위치 : 마포구 상암동 478-1외 3개소

- 작업수량

(단위 : 주)

구 분	규 격	작업지시	실작업량	비고(증감)
위험수목	B22	30	30
	B24	20	20
	B26	20	20
	B28	8	8
	B30	6	6
	B35	4	4
	B40	4	4
	계	92	92

ㅇ 규격별 제거 총수량

(단위 : 주)

구 분	규 격	1차작업	2차작업	계
위험수목	B22	6	30	36
	B24	6	20	26
	B26	-	20	20
	B28	1	8	9
	B30	2	6	8
	B35	8	4	12
	B40	3	4	7
	계	26	92	118

Ⅲ		향후계획

ㅇ 설계변경 시행

ㅇ 시민 안전 및 건설공사 품질향상을 위하여 현장관리 철저 등

붙임  1. 공사비 증감 대비표 1부.

2. 설계변경 사유 및 물량증감내역 1부.

3. 변경설계서 1부.

4. 계약금액조정 검증(기술심사담당관)확인서 1부. 끝.