아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	남부수도사업소
수신	서울시설공단이사장(공사감독2처장)
(경유)
제목	변경계약(기한연장) 체결 통보[낙성대배수지(1지) 내부방식 공사]

1. 공사감독2처-7738(2024.6.19)호와 관련입니다.

2. 위 대호에 의거 우리사업소에서 시행중인『낙성대배수지(1지) 내부방식 공사』의     준공기한 연기원 검토보고서 제출건에 대하여 변경계약(기한연장)을 체결하고     알려드리니 잔여공정 완료 및 준공처리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 낙성대배수지(1지) 내부방식 공사

나. 계 약 자 : *******************

다. 준공기한 연기 : 95일

구 분	공 사 기 간	지체상금 부과 여부	귀책사유
당 초	2023. 8. 3. ~ 2024. 6. 30.	미 부 과	도급사 책임 사유 없음
변 경	2023. 8. 3. ~ 2024. 10. 3.

끝.

	남부수도사업소장
급수관리팀장	류태현		급수운영과장	전결 06/28
代김윤환
협조자
시행	급수운영과-9581	(	2024. 6. 28.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길, 97	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4541	/전송	02-3146-4589	/	taehyeon@seoul.go.kr	/	부분공개(6)