문서번호	기전과-8583
결재일자	2024. 6. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
박요셉		차경호	06/28
			하현석
협조
	주무관		박신범

「위례터널 전력설비 이중화 사업」

감리용역 추진 계획 보고

2024. 6. 28.(금)

동부도로사업소

(기전과)

「위례터널 전력설비 이중화 사업」

감리용역 시행 계획 보고

「위례터널 전력설비 이중화 사업」의 전력시설물 설치·보수공사 품질확보 및 향상을 위해 법정 기준에 의한 감리용역을 시행하고 안전한 시설물 관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관련 근거

□ 위례터널 외 1개소 전력설비 이중화 사업 추진 계획

ㅇ 기전과-1867(2024.2.7.)호

□ 전력기술관리법(공사감리 등) 제12조

ㅇ 전력시설물의 설치·공사의 감리 시행 대상 및 제외대상

□ 지방자치단체 예산편성 운영기준(예산의 변경사용)

Ⅱ		사업개요

□ 사 업 명: 위례터널 전력설비 이중화 사업

□ 사업위치: 위례터널 전기실(주, 부)

□ 사업기간 : 2024. 2. ~ 2024. 10.

□ 사 업 비 : 금1,500백만원

□ 사업내용

ㅇ 수배전반 신설 17면 및 전기공사 1식

ㅇ 수배전반 전력제어 및 기타 부대공사 1식

Ⅲ		감리비 예산편성 검토

□ 「위례터널 전력설비 이중화 사업」감리비 편성 필요

ㅇ 해당 사업은「전력기술관리법」제12조(공사의 감리)제1항에 의거 전력시설물 설치·보수공사의 품질확보 및 향상을 위한 감리 선임 대상 공사이나, 감리비 미요청 및 미편성되어 현재 용역발주 불가

시설명 (준공연도)		총 연장 (m)	수전전압 (방식)	계약용량 (kW)	감리선임 대상		비고
					여 부	근거
위례 터널 (2017)	주전기실	2,362	22.9kV (3∅4W)	1,070 *조명:120 동력:950	ㅇ	전력기술관리법 제12조제1항	*조명용 계약용량 변경 (기전과-5888, 2024.5.2.)
	부전기실		22.9kV (3∅4W)	1,070 *조명:120 동력:950

□ 예산조정(통계목 변경) 요청하여 감리비 확보

ㅇ 당초예산을 활용하여「도로시설물 노후 전력설비 개량」 사업의 동일 편성목 내 통계목을 변경하여 감리비 예산 확보

- 「지방자치단체 예산편성 운영기준」(예산의 변경 사용)

Ⅳ		세부 추진 계획

□ 감리용역 발주

ㅇ 사 업 명: 위례터널 전력설비 이중화 전기감리용역

ㅇ 관련법령:「전력기술관리법」제14조에 따른 감리업으로 등록한 업체

ㅇ 계약대상자:*****************

- 주    소: ***********************************

ㅇ 용역기간: 착수일로부터 65일

ㅇ 계약방법: **********

- 관련근거: 지방계약법 시행령 제25조제1항제5호마목, 제30조제1항제2호가목

ㅇ 소요예산: *******************

ㅇ 예산과목

- 서 울 시: 동부도로사업소 기전과, 도로시설관리, 기전시설물관리,

도로시설물 노후 전력설비 개량, 시설비**************

- 성 남 시: 세입세출외 현금**************

※ 위례터널 시설물 유지관리 분담금 비율: 서울시(65%), 성남시(35%)

ㅇ 사전 검토사항 : 기술용역 타당성심사 의뢰(→기술심사담당관)

□ 예산과목 통계목 변경

ㅇ 변경 신청금액(서울시 분담금): ********************

(단위: 천원)

세부사업	편성목	통게목	당초예산	예산변경액		변경후 예산액
				증	감
****************	********* *****	*** ********	*********	*	*******	*********
		*** ********	*	******	*	******

Ⅴ		향후 계획

□ 2024. 6. : 기술용역 타당성 심사 의뢰

□ 2024. 6. : 예산조정(통계목 변경) 요청(→도로시설과)

□ 2024. 7. : 감리 용역 발주 및 시행

□ 2024. 8. : 공사 및 물품 발주 및 시행

□ 2024. 10. : 공사 준공 및 물품 납품

붙임  1. 전기감리 용역대가 산출서 1부.

2. 과업내용서 1부.

3. 산출기초조사서 및 견적서 각 1부.  끝.