문서번호	배수과-5929
결재일자	2024. 7. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
안효민		유양현	07/02
			백광인
협조	주무관		이성교
	주무관		안효준

「함지박사거리~방배초교 입구 장기사용 송배수관 정비공사」관련

부단수 차단 급수운영 결과보고

2024. 7. 1. (월)

서울아리수본부

(급 수 부)

「함지박사거리~방배초교 입구 장기사용 송배수관 정비공사」관련

부단수 차단 급수운영 결과보고

급수부장 : 백광인 ☎3146-1401  배수과장 :유양현 ☎1430  담당:안효민☎1432

□ 관련근거

ㅇ 종점부 단수발생 관로공사 추진계획 알림 및 밸브조절 등 업무협조 요청

[시설건설과-5510호(2024.6.4.)]

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 함지박사거리~방배초교 입구 장기사용 송배수관 정비공사

ㅇ 규    모 : D=700㎜, L=1,016m

ㅇ 기    간 : 2022.8.16. ~ 2024.6.28.

ㅇ 도 급 비 : 금2,387,896,000원

ㅇ 시 공 사 : 에스디원건설(주) 대표 백정주

ㅇ 감    독 : 서울시설공단 공사감독2처

ㅇ 위 치 도

□ 급수운영결과

[ 단수 및 혼탁수 민원 : “없음” ]

☞ 부단수 차단 및 사전작업(대체관로 부설 등)을 통해 단수 및 혼탁수 민원 없이 공사 시행

ㅇ 추진일시: ’24. 6.21.(금) 18:00 ~ 익일 03:00 [9시간]

ㅇ 급수지역 단수 예방을 위해 대체관로 부설·제수밸브설치 등 사전작업 시행

ㅇ 수충격으로 인한 혼탁수 발생을 방지하기 위해 부단수 천공‧차단 시  최대한 천천히 시행하여 유속변화 최소화

ㅇ 비상 상황 대비 상황체계 유지 (본부/사업소)

□ 시간대별 추진사항

ㅇ 부단수 차단 지점 터파기	: ’24.6.21.(금)	22:00
ㅇ 부단수 차단기 설치 및 차단		23:30
ㅇ 잔류수 퇴수 및 기존관 절단	: ’24.6.22.(토)	00:30
ㅇ 신설밸브 설치		03:00
ㅇ 부단수 차단기 철거		04:00
ㅇ 되메우기 및 포장복구		05:00

□ 행정사항

ㅇ 비상근무자 초과근무 및 대체휴무 인정

붙임  1. 현장사진 1부.

2. 비상근무자 초과근무 및 대체휴무 현황 1부.  끝.