문서번호	치수과-4896
결재일자	2024. 7. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
박지수		김창신	07/01
			이유국
협 조

- 2024년 한강 수로조사 및 하상관리 방안 수립 용역 -

수로조사 간격 조정 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024.  7.

미래한강본부

(시설부)

- 2024년 한강 수로조사 및 하상관리 방안 수립 용역 -

수로조사 간격 조정 검토 보고

안전한 수상교통 운항환경 조성을 위해 한강 리버버스 항로 구간의 수로조사 간격 조정 계획을 검토하여 보고 드림

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명 : 2024년 한강 수로조사 및 하상 종합관리방안 수립 용역

ㅇ 위    치 : 신곡수중보 ~ 서울시 강동구 하일동 시계

ㅇ 용역기간 : '24. 4. 24. ~ '24. 12. 31.

ㅇ 과업내용 : 하상변동 조사 및 분석, 준설계획 수립

- 한강 수심측량 : 한강본류 161.02km, 지천합류부 및 취수장 90.82km

*******************

ㅇ 용 역 사 : (주)정엔지니어링, 현공간정보(주)

□ 추진경위

ㅇ '23. 4.  3 : 그레이트 한강 프로젝트 추진계획 수립(시장방침 제32호)

ㅇ '24. 3. 15 : 한강 리버버스 운영계획 수립(시장방침 제15호)

ㅇ '24. 5. 22 : 한강 준설현황 시장보고(수로조사 간격 조정안 포함)

ㅇ '24. 6. 13 : 한강 준설량 증대방안 검토 등(시장요청사항 116호)

□ 보고내용

ㅇ 한강 리버버스가 금년 하반기(10월) 운영이 예정에 따라 안전한 운항을 위해 수로조사 일부구간 간격 세분화(당초 250m → 변경 50m)

- 현재 한강 리버버스 항로구간 중 원효대교~잠실수중보 구간은 250m 간격으로 수로조사 중으로 정확한 하상의 변동 확인이 곤란한 실정

⇒ 하상변동에 따른 선박 운항 안전성 확보를 위해 수로조사 50m 간격으로 세분

‣ 수로조사 간격 조정(안)

구 분	한강갑문~원효대교 (15.75㎞)	원효대교~잠실수중보 (15.25㎞)	잠실수중보~서울시계 (10.50㎞)
당 초	50m	250m	250m
변 경	50m	50m	250m

※ '24년 한강갑문~원효대교 수로조사는 한강 주운수로 설계용역 자료 활용(서울항조성과)

ㅇ 용역비 증·감 현황                                        (단위 : 원)

공 종	당 초	변 경	증․ 감		비 고
*******	171,717,273	224,200,000	**	**********
*********	**********	**********	**	*********
*********	***********	***********	**	**********

□ 조치계획

ㅇ 홍수기 전 수로조사 완료를 위해 원효대교~잠실수중보 구간 수심측량 우선 작업지시

ㅇ 추가 조사에 따른 소요예산은 낙찰차액 등 사용

- 신규비목은 상호 협의한 협의율(87.848%) 적용하여 설계변경 시 반영

□ 행정사항

ㅇ 작업지시 통보(치수과→(주)정엔지니어링)

ㅇ 물량 증‧감 사항을 반영하여 추후 설계변경 시행.  끝.