문서번호	시설관리과-10957
결재일자	2024. 7. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
강철운	김용섭	07/02
		代신동철
협 조
	주무관		이연한
	주무관		김종묵
	주무관		노경근
	주무관		박성열
	주무관		성동제
	주무관		백승호

「2023년 은평구 관내 상수도공사」 공사기간 연기보고서

2024.06.28

시설관리과

건 명	「2023년 은평구 관내 상수도공사」 공사기간 연기보고서
보고내용	- 아래 건별공사는 2023년 연간단가계약업체인 전흥종합건설(주) 대표 조윤진으로 하여금 공사토록 작업지시 하였으나 준공기한 임박한 작업지시 건에 대하여 차기업체에 재 작업지시함이 타당하다 사료되며 - 2024년 신규 계약업체인 인웅공영 주식회사 (대표 오대길)로 하여금 아래와 같이 변경 작업지시하여 급수공사 시행에 만전을 기하고자 합니다. ◆ 변경 공사기간 : 2024. 06.01. ~ 2024. 07.30.(각 지시 별 상이)
분 류	지시번호	주 소	당초 공사기간	변경 공사기간
신설	111	은평구 진관동 25-3 창릉다목적구장	2024.05.22 ~ 06.30	~ 7/30 까지
신설	118	은평구 진관동 436-1 신도근린공원	2024.06.12 ~ 06.28	~ 7/30 까지
신설	123	갈현동 281-127	2024.06.21 ~ 07.05	~ 7/30 까지
불용관	203	은평구 진관동 29-2 외 2개소	2024.04.12 ~ 06.30	~ 7/30 까지
불용관	226	은평구 구산동 10-34	2024.05.29 ~ 06.12	~ 7/30 까지
불용관	241	갈현동 474-3	2024.06.14 ~ 06.27	~ 7/30 까지
불용관	242	은평구 역촌동 83-15	2024.06.14 ~ 06.28	~ 7/30 까지
불용관	243	응암동 581-1	2024.06.19 ~ 07.02	~ 7/30 까지
소화전	16	은평구 녹번동 177-3	2024.05.20 ~ 06.03	~ 7/20 까지
소화전	17	은평구 수색동 106-6 153-9	2024.06.13 ~ 06.26	~ 7/30 까지
소화전	18	은평구 대조동 89-15	2024.06.18 ~ 06.30	~ 7/10 까지
관망개선	9	은평구 불광동 357-7	2024.06.15 ~ 06.28	~ 7/30 까지
간선배관	9	은평구 갈현동 420-20도	2024.05.02 ~ 06.30	~ 7/30 까지
대형관 물세척	3	은평구 신사동 신사오거리 작업구	2023.05.30 ~ 07.19	~ 7/30 까지
대형관 물세척	4	은평구 응암동 응암오거리 작업구	2024.05.30 ~ 07.19	~ 7/30 까지

분 류	지시번호	주 소	당초 공사기간	변경 공사기간
보온재및뚜껑교체	169	은평구 불광동 16-275	2024.06.14 ~ 06.27	~ 7/20 까지
보온재및뚜껑교체	170	은평구 신사동 344-7	2024.06.19 ~ 07.02	~ 7/20 까지
비 고	※지체상금 미부과