문서번호	시설관리과-11154
결재일자	2024. 7. 3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
안전관리팀장	시설관리과장
김철수	07/03
	代신동철

공사실정 보고

(연희배수지(1호지)외 1개소 내부 방식공사)

2024. 7. 3.(수)

서부수도사업소

(시설관리과)

공사실정 보고

(연희배수지(1호지)외 1개소 내부 방식공사)

*******************************

우리 사업소에서 시행중인「연희배수지(1호지)외 1개소 내부 방식공사」와 관련하여 아래와 같은 사항이 발생하여 보고 합니다.

Ⅰ		공 사 현 황

□ 공 사 명: 연희배수지(1호지)외 1개소 내부 방식공사

□ 공사기간: 2023.07.20.~ 2024.08.14.(1차: 2023.07.20.~12.31.)

□ 도 급 비: ************

□ 공사개요: 도막식 방수방식 2,125m², 패널식 방수방식 394m²

□ 도 급 자: *******

□ 공 정 율: ***************

Ⅱ		보고내용

□ 항 입구 전실 도장설계 누락

□ 독박골배수지(1지) 항 내부는 공법선정위원회개최 결과에 따라 ‘세라믹코팅제’를      사용하여 시공 완료하였으나, 항 입구 전실은 당초 설계에서 누락 됨

□ 항 입구 전실은 콘크리트 구조이며 수돗물과 접촉되지 않는 부분으로 에폭식      수지계 도료(청색)를 사용하여 마감하고자 함

시공물량: 약 50㎡(벽, 천정)

Ⅲ		행정사항

□ 항 입구 전실은 에폭식수지계 도료(청색)를 사용하여 시공하고 향후         설계변경에 반영하도록 서울시설관리공단에 통보하고자 합니다. 끝.