아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서 울 물 연 구 원
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 및 변경계약 시행(청사 본관기계실 모터펌프 제작설치)

1. 총무과 - 7971(2024. 6. 24)호와 관련입니다.

2.『청사 본관 기계실 모터펌프 제작구매설치』 수행이 완료되어 아래와 같이

설계변경 및 변경계약을 시행하고자 합니다.

가. 계약건명 : 청사 본관 기계실 모터펌프 제작구매설치

나. 계약기간 : 2024. 3.21 ~ 2024. 9.17

다. 계약상대자 : ********************

라. 설계변경내역 : 물량 증감 및 신공종발생에 따른 적정성여부경

마. 예산과목 : 행정운영효율화 및 직원만족도제고, 행정장비확충 및 청사환경

개선, 기계장치, 시설비 및 부대비, 시설비

바. 설계변경금액

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증․감	비 고
계약금액		178,855,600	170,858,490	감7,997,110
	공급가액	162,596,000	155,325,900	감7,270,100
	부가가치세	16,259,600	15,532,590	감727,010

사. 계약기간 : 변동사항없음

붙임  1. 설계변경 심의 위원회 결과보고 1부.

2. 설계변경보고 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 설계변경내역서 1부.

5. 설계변경심의요청서. 1부.

6. 설계변경심의위원회의견서 1부.   끝.

주무관	임승용		주무관	주서연		총무과장	07/02
양연화
협조자
시행	총무과-8370	(	2024. 7. 2.	)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 천호대로 716, (구의동)구의동130-1번	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1712	/전송	3146-1728	/	sylim@seoul.go.kr	/	부분공개(1,7)