문서번호	정수시설과-2403
결재일자	2024. 7. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	정수시설과장	강북아리수정수센터소장 직무대리
김근혁	이진근	최병희	07/03
			최형준
협 조
	행정관리과장		정종철

「배출수지 슬러지수집기 제조구매 설치」

설계변경 사항 검토 보고

2024. 07.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

「배출수지 슬러지수집기 제조구매 설치」

설계변경 사항 검토 보고

강북아리수정수센터소장 : 최형준 ☎3146-5801 정수시설과장 : 최병희 ☎5870 담당 : 김근혁 ☎5876

배출수지 슬러지수집기 제조구매 설치 건과 관련하여 공종 및 제경비 변경 사항이 발생하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 배출수지 슬러지수집기 제조구매 설치

ㅇ 사업기간 : *****************************************

ㅇ 계약금액 : ******************************

ㅇ 계 약 자 : ***********************************

ㅇ 사업내용 : 슬러지수집기 대차 6대, 구동 기기 설비 3Set 등

□ 설계변경 내용

ㅇ 설계변경 사유 : ******************

****************************************************************************

ㅇ 주요 공종 변경사항

단위 : 천원

연번	변경사항	당초	변경	증·감
1	****************** *********************************	*****	*****	********
2	*************** ************************	******	******	********
3	************** *********************	******	******	********
4	********** *****************	******	******	********

ㅇ 제경비 정산 세부현황

단위 : 원

구 분	당 초	변 경	증·감
산출경비	*********	*********	***********
건강보험료	*********	*	***********
연금보험료	*********	*	***********
노인장기요양보험료	*******	*	***********
환경보전비	*******	*	***********
건설 기계 대금 대여금 지급 보증수수료	*******	*	***********
일반관리비	*********	*********	***********
이윤	**********	**********	***********

ㅇ 공사비 증·감 현황

단위 : 천원

구 분		당 초	변 경	증·감
도급비	공급가액	*******	*******	********
	부가가치세	******	******	********
	합 계	*******	*******	********

□ 향후계획

ㅇ 상기 변경 내용에 따라 공종 변경, 보험료 정산 등에 대한 자체 설계변경 심의 위원회를 개최코자 하며,

ㅇ 설계변경 심의 위원회 결과에 따라 설계변경 시행 후 준공

따로붙임 1. 설계변경내역서 1부.

2. 제경비 검증확인서 1부. 끝.