문서번호	치수과-5065
결재일자	2024. 7. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	치수과장
김한성	07/03
	김창신

-보광나들목 리모델링 공사-

실정보고에 대한 검토 보고

2024. 7.

미래한강본부

(시설부 치수과)

-보광나들목 리모델링 공사-

실정보고에 대한 검토 보고

시설부장 : 이유국☎3780-0830 치수과장 : 김창신☎0682 담당 : 김한성☎0651

『보광나들목 리모델링 공사』관련 서울시설공단 실정보고 사항(보행자 통로 설치 및 동영상 촬영 계획)에 대한 검토 및 처리계획을 보고 드림

□ 공사 개요

ㅇ 공 사 명 : 보광나들목 리모델링 공사

ㅇ 공사기간 : '24. 3. 25. ~ '25. 3. 24.

ㅇ 공사규모 : 엘리베이터 설치 및 나들목 내·외부 환경개선

*******************

***************************

ㅇ 공사감독대행 : 서울시설공단 공사감독 1처

□ 보고 내용

ㅇ 관련문서

- 공사감독1처-3583호(2024.7.1.) 『실정보고 검토보고(보행자 통로 설치)』

- 공사감독1처-3603호(2024.7.1.) 『실정보고 검토보고(동영상 촬영계획)』

ㅇ 보행자를 위한 나들목 통로 부분 통제로 인한 가림막 휀스 신규설치 반영

- 방음판넬(L=20m), 가림막휀스(L=54m) 신규 반영

- 개략공사비 약 4,321천원(제경비 포함)

나들목 통로 부분통제 시공 상세도	현황 사진

ㅇ 동영상 촬영 계획 보고

□ 검토 내용

<서울시설공단>

ㅇ 가림막 휀스 신규 설치 건

- 보광나들목 이용하는 시민이 공사기간 중 통행 폐쇄 조치 없이 안전하게 사용하기 위하여 공사구간과 시민통해 구간의 구분을 위하여 필요한 사항임

ㅇ 동영상 촬영 계획 건

- 동영상 촬영 목적, 촬영 종류 및 장비계획이 "건설공사 동영상 기록관리 매뉴얼 ver.2(2024.02.)기준에 맞추어 적정하게 작성됨

<보고자 의견>

ㅇ 가림막 휀스 신규 설치는 내부통로의 시민 이동경로와 공사를 위한 통행공간의 분리를 위해 가림막 휀스 설치 반영 적정

ㅇ 원활한 공사품질 향상 및 안전확보를 위한 동영상 촬영 계획 적정

ㅇ 신규대가에 대한 낙찰율 적용(87.74%)

□ 조치 계획

ㅇ 검토내용과 같이 실정보고 사항 승인 통보(치수과→서울시설공단)

ㅇ 공사 시행 중 안전관리 철저 및 추후 설계변경 시 반영

붙임. 서울시설 공단 검토 보고서 각 1부.  끝.