문서번호	치수과-4913
결재일자	2024. 7. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
박지수		김창신	07/02
			이유국
협 조

- 2023년 한강 준설공사 건설사업관리용역 -

설계변경 검토보고(총차2회 2차2회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 7.

미래한강본부

(시설부)

- 2023년 한강 준설공사 건설사업관리용역 -

설계변경 검토보고(총차2회 2차2회)

「2023년 한강(저수로, 취수장 주변) 준설공사 감독권한대행 건설사업관리 용역」정산 설계변경(총차2회, 2차2회) 계획을 보고 드림

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명 : 한강(저수로, 취수장 주변) 준설공사 감독권한대행 건설사업관리용역

ㅇ 과업내용 : 준설공사 전반에 대한 감독권한대행 업무

- 취수장 주변 준설 및 반출 : 38,990㎥

- 저수로 준설 : 75,230㎥, 준설토 반출 : 118,315톤

ㅇ 용역기간 : '23. 9. 4. ~ '24. 7. 15.(2차 '24. 1. 12 ~ '24. 7. 15.)

**************************************

ㅇ 계약상대자 : ㈜이준엔지니어링 외 1개사 대표 김정대

□ 설계변경 내용

ㅇ 변경사유 : 건설사업관리기술인 투입 인력 조정 및 차량임차료 정산 등

ㅇ 주요 변경사항

구 분	규 격		단위	당 초	변 경	증 · 감
총차 (2회)	건설사업 관리기술인	상주 및 기술지원	인‧월	24.85	24.67	감) 0.18
	차량임차	1식	월	8.45	8.30	감) 0.15
2차 (2회)	건설사업 관리기술인	상주 및 기술지원	인‧월	14.71	14.50	감) 0.21
	차량임차	1식	월	6.05	6.30	증) 0.25

ㅇ 용역비 증·감 현황

- ********************************                       (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증·감
***	*******	***********	***********	****	*********
	*****	************	**********	****	*******
	*	*************	***********	****	*********

- **********************************                  (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증·감
***	*******	***********	***********	****	*********
	*****	************	**********	****	*******
	*	*************	***********	****	*********

□ 조치계획

ㅇ 건설사업관리기술인 투입 인력 및 차량임차료 등 정산 사항을 반영하여 설계변경 시행

ㅇ 변경계약 의뢰(치수과 → 총무과)

붙임 : 변경 내역서(총차2차, 2차2회) 각 1부.  끝.