문서번호	시설건설과-6679
결재일자	2024. 7. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설건설과장	시설부장 직무대리
강은영		이승우	07/04
			김근용
협조
	주무관		오장록

「광암수계 배수관로 정비공사(1공구)」

서부로 확장구간 공정만회 대책 보고

2024.  7.

상수도사업본부

(시설건설과)

「광암수계 배수관로 정비공사(1공구)」

서부로 확장구간 공정만회 대책 보고

「광암수계 배수관로 정비공사(1공구)」구간중 한국도로공사에서 시행하는 서부로 확장공사와 연계 시행할 예정인 상수도공사 구간의 공정만회대책을 마련하여 보고 드림

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 광암수계 배수관로 정비공사(1공구)

ㅇ 규    모 : D=300~1,800㎜, L=8.9㎞

- 비굴착정비(한국가스공사~풍납사거리) : D1000~1500㎜, L=7.0㎞

- 굴착교체(광암정수센터~서부초교) : D1800㎜, L=1.3㎞

- 급수 연계관로 : D300~700㎜, L=0.6㎞

ㅇ 공사기간 : ’22. 3.21.~’27. 8.16.(1차 ’22. 3.21.~’24. 9.25.)

ㅇ 도 급 비 : 51,655,291천원(1차 16,491,000천원)

ㅇ 시 공 사 : 계룡건설산업(주) 대표 이승찬 외 1개사

ㅇ 감 리 사 : ㈜천일 대표 김창욱 외 4개사

□ 추진실적(6.30.기준)

ㅇ 관로정비 : D=300~1,000㎜, L=1.2㎞(공정률 13.4%)

- 비굴착정비 : 한국가스공사 ~ 삼전역 D1000㎜, L=0.9㎞

- 급수연계관로 : D300~700㎜, L=0.3㎞

※ 굴착교체구간 미착공

□ 문 제 점

ㅇ 한국도로공사에서 시행하는 서부로 확장공사가 ’22년 완료될 것으로 예상되었으나, 지질층이 당초 연암에서 경암으로 확인되어 공사지연

- 가스충전소 및 상가 인근지역으로 발파작업 불가로 시공 불가

- 7개월이상 기간 소요(당초 설계시 공사기간 3개월)

	< 서부로확장공사 >
ㅇ 사업명 : 세종~포천 고속도로 안성~구리 건설공사 제12공구 ㅇ 발주처 : 한국도로공사 ㅇ 공사위치 : 경기도 하남시 감이동~경기도 하남시 초이동 ㅇ 공사기간 : 2017.04.24. ~ 2024.12.18. ㅇ 공사규모 : 왕복 6차로 L=2.4km, 고속도로 램프설치에 따른 노선변경 ㅇ 현재진행상태 : 왕복 4차로 임시도로개통 준비중 (7월초 예상)

ㅇ 기존 도로상에 있는 지하시설물을 서부로 신설구간으로 모두 이설함에 따라 서울시 상수도 관로 매설 공간 부족

- 임시 도로개통 후 상수도관(D400㎜), 하수도관(D600㎜), 광케이블(D100㎜) 등 지하시설물 이설(9월말 예정)

ㅇ 한국도로공사에서 시행하는 세종~포천 고속도로 개통 일정이 임박하여 상수도관 부설 기간 절대 부족

- ’24. 11월 개통 예정, 도로포장 후 3년간 굴착불가

□ 개선대책

ㅇ 상수관로를 당초 서부로 확장구간에서 기존 서부로(강동방향) 우측 여유부지로 노선을 변경하여 공사 추진

- 공사개요 : D1800㎜×2열, L=1,040m(감 230m)

- 노선 변경에 따른 공사비 절감내용

구 분	당 초	변 경
위치도
검 토	- 위치 : 서부로 신설구간 - 시공연장 : L=635m(2열) - 공사시기 : 2027년 이후 - 지하매설물 산재로 공사 불가 - 경암층 존재 多	- 위치 : 기존 서부로 우측여유부지 - 시공연장 : L=520m (2열) - 공사시기 : ’24. 7월이후 가능 - 일부 경암층 존재 (시공연장 230m 감소)
소 요 일 수	3개월	2.5개월 (15일 감소)
개 략 공사비	- 7,937백만원	- 5,139백만원 (2,798백만원 감액)

ㅇ 1차수 공사가능 구간에 대하여 설계 및 지반조사용역 시행

- 공사개요 : D1800㎜, L=590m

- 노선 변경(안) 구간에 대한 지반조사(6개소)

□ 행정사항

ㅇ 위 개선대책에 따라 공사를 추진토록 감리단 및 시공사에 요청

ㅇ 공사비 증·감 사항 등 설계 변경은 향후 반영

□ 향후일정

ㅇ 임시 도로개통 : ’24. 7.

ㅇ 설계 및 도로점용 : ’24. 7.

ㅇ 관로 공사 : ’24. 7. ~ ’24. 12.

붙 임 서부로 관련 추진 경위 1부.  끝.

별첨 1. 서부로 추진경위

연번	일 시	참여기관		내 용	비고
		발신	수신
1	’22. 4.~’23. 4	한국도로공사 (시공사:DL이엔씨)	서울아리수본부 (시공사:계룡건설)	서부로 공사 일정 협의	유선 협의
2	’22. 12.28.	서울아리수본부 시설건설과	한국도로공사 안성구리사업단	『서부로 확장공사』 구간 공사 일정 요청 - 서부로 확장공사와 병행하여 상수도 공사를 시행하고자 상세 일정을 요청	공문
3	’23. 1.26.	한국도로공사 안성구리사업단	서울아리수본부 시설건설과	『서부로 확장공사』 구간 회신 - 안성 구리간 건설공사 제12공구와 관련하여 예정공정표 회신	공문
4	’23. 1.31.	한국도로공사		공사 시기 관련 합동 회의(1차) - 참석자 : 발주청, 감리단, 시공사, 한국도로공사 - 당초 계획보다 공사 일정이 지연되고 있으니 공정관리에 협조 요망 - 7월 임시도로 개통 예정으로 상수도 공사 시기 미정
5	’23. 2. 9.	한국도로공사		공사 시기 관련 합동 회의(2차) - 참석자 : 발주청, 감리단, 시공사, 한국도로공사 - ’23.7.~’24.2. 기간중 상수도공사 시행 노선 변경 검토 요청
6	’23. 2.~ 8.	서울아리수본부 시설건설과	서울아리수본부 (시공사, 감리단)	서부로 관로 부설 및 노선 변경검토	회의
7	’23. 8.~ 10.	서울아리수본부 시설건설과	하남시,수자원공사	서부로 유관기관 인허가 사항 및 확인굴착 실시(3개소)	공문
8	’23. 12.28.	한국도로공사 (시공사:DL이엔씨)	서울아리수본부 (시공사:계룡건설)	공사 시기 관련 합동 회의(3차) - 참석자 : 발주청, 감리단, 시공사, 한국도로공사 지속적인 지연으로 공사가능시기 미정 노선 변경 검토 요청	회의
9	’24. 1.24.	서울아리수본부 시설건설과	서울아리수본부 (시공사, 감리단)	시점부 시공방안 검토	유선 협의
10	’24. 3. 8.	한국도로공사 안성구리사업단	서울아리수본부 시설건설과	공사 시기 관련 합동 회의(4차) - 참석자 : 발주청, 감리단, 시공사, 한국도로공사 - 지장물 및 고속도로 구간 저촉으로 신설도 로내 상수도관 부설 불가 노선 변경방안 검토 필요	회의
11	’24. 4.20.			기존 서부로 지반조사(3개소) 경암 확인
12	’24. 6.10.	한국도로공사 (시공사:DL이엔씨)	서울아리수본부 (시공사:계룡건설)	고속도로공사 준공일정 확인 (안성~구리 12공구 준공일 ’24.12.18.)	유선 협의

※ 원인자 이설구간(한국도로공사)은 '22.9.완료