문서번호		차량품질관리센터-3765		주임		부장	센터장		본부장
등록일자		2024. 7. 5.
									2024.7.5.
결재일자		2024. 7. 5.
공개여부		대시민공개
				협조	차량계획처 처장
방침번호		본부장-60
					철도사업처 처장
	『수도권 광역급행열차 A노선(GTX-A) 120칸』 제작관리 위임업무 추진경과 보고
2024. 7.
차 량 본 부 차량품질관리센터

『수도권 광역급행열차 A노선(GTX-A) 120칸』

제작관리 위임업무 추진경과 보고

GTX-A노선 120칸 철도차량 제작관리 위임 계약기한이 도래함에 따라 우리 부서의 위임업무 추진경과를 보고드림.

□ 관련 근거

ㅇ 수도권광역급행철도A노선 관리운영위위수탁 사업 계약(’19. 9. 30.)

ㅇ GTX-A노선 철도차량 제작관리 위임계약(’20. 4. 29.)

ㅇ 신교통사업처-2537(’20. 8. 3.)『차량제작 단계별 업무분장(안)』

□ 계약 내용

구 분	에스지레일 ⇔ 현대로템 에스지레일: 수도권광역급행철도A노선 민간투자사업 사업시행자(설립: 2018.12.10.일, 대표자: 박명식)	에스지레일 ⇔ 서울교통공사	비고
계 약 명	“GTX-A노선 민간투자사업 철도차량 물품공급 계약”	“GTX-A노선 철도차량 제작관리 위임 계약”	※ 영업운행 시까지 계약연장 예정 (철도사업처)
계약기간	’20. 3. 19. ~ ’24. 7. 29.(52개월)	’19. 10월 ~ ’24. 6월(57개월)
계약금액	약 3,452억 원(약 28.7억원/칸)	약 30억 원(연도별 분할 지급)	부가세 포함
공급대상	철도차량 120칸, 입환작업차 1대, 시설물모니터링 시스템, 차축발열감지장치, 예비품(2편성) 등
영업구간	재정구간(삼성 ~ 동탄) / 민자구간(운정 ~ 삼성) ※ 민자구간 공사 초도 1편성 투입 영업운행 중

□ 업무 구분(상세내용 ‘붙임’ 참조)

구 분	철도사업처(구 신교통사업처) ⇒ 총괄 및 책임	차량품질관리센터 ⇒ 기술전담 및 인력 지원
주요업무	- 사업수행계획서 이행 - 주무관청 및 사업시행자 대응 - 기반시스템 및 차량기지 연계 - 반입차량 동적거동 계획 수립 - 개통 전까지 차량 관리 등	- 주요장치 부품공급사 검토 - 기술자료 검토 및 승인 관리 - 공정관리자 제작공장 상주 관리 - 예비주행시험 및 본선시운전 - 준공자료 검토 및 승인 등

□ 추진 경과

ㅇ 목업(Mock-up)차량 품평회

- 장    소: 현대로템㈜ 창원공장 / ’21. 4. 15.(목)

- 인    원: 23명(철도사업처 ․ 센터, 국토교통부 등 유관기관)

- 의견수렴: 객실 손잡이․의자 색상 등 참석자 의견수렴 차량설계․제작에 반영

ㅇ 부품공급사 및 기술자료 검토

구 분	주요 내용	업무 실적
부품공급사 검토	∘ 제작사에서 제안하는 부품공급사의 납품 및 영업운행 실적 등 검토	∘ 차체 등 45개 장치 90개 부품공급사 검토 - ISO 9001 인증 및 납품실적 등 제출자료 검토 - 검토의견 결과송부(1~4차)
기술자료 검토 및 승인	∘ 품질향상(유지보수 최적화, 에너지 효율화 등) 반영 여부 등 기술자료 검토 및 승인	∘ 기술자료 215건 검토 및 승인 - 검토서, 계산서, 규격서 등 ∘ 설계도면 944매 검토 및 승인 - 회로도, 결선도, 장치도 등

ㅇ 제작 공정관리 및 출고검사 실시

구 분	제작 공정관리	출고검사
기 간	’21. 12월 ~ ’24. 11월 (36개월)	’22. 12월 ~ ’23. 10월 (11개월)
인 원	총 106명 (센터, 철도사업처, 차량운영·정비처 등)	총 84명 (센터, 철도사업처, 차량계획처 등)
장 소	현대로템 창원공장(경남 창원시 소재)
내 용	∘ 승인된 기술자료 및 설계도면 일치여부 확인 ∘ 품질향상 개선사항 및 유지보수성 등 확인	∘ 외관상태 및 상하기기 및 실내기기 검사 ∘ 차량기능 및 유지보수성, 안전성 등 검사

[품질향상 개선] - 총 309건 개선요청(완료 221건, 조치예정 88건) … ’24.6.27. 기준

구 분	합 계	완 료	조치예정	주 요 내 용	비 고
공정관리	139	136	3	∘ 차체 용접부 비정상 연마작업 개선 ∘ 고전압 장치 위험표시 시인성 확보 등
출고검사	170	85	85	∘ 보안제동 취급 시 운전실 안내방송 추가 ∘ 전면 열번표시기 표출 오류 개선 등

ㅇ ISA(독립안전성평가 / 리카르도레일) 관리(미참여)

- 공    사: GTX-A노선 차량제작에 대한 책임 이행을 위해 ISA 관리요청

- 에스지레일: 독립안전성평가 결과 자체관리(승인) 의사 표명

- 최종협의: 예비위험원분석(PHA) 자료 공사에 제공, 차량설계에 반영 조치

ㅇ 형식․시운전 시험 및 완성차 관리

- 기    간: ’21. 8월  ~  ’23. 10월(23개월)

- 인    원: 80명(차량품질관리센터, 철도사업처, 차량계획처 등)

- 장    소: 부품공급사, 철도공사 부발기지, 오송시험선

- 내    용: 부품 형식시험, 초도편성 본선시운전 시험, 완성차량 관리 등

[시험 및 완성차 관리 요약]

구 분	주요 내용	업무 실적
부품 형식시험	∘ 장치별 시험편 적합성 및 시험장비 교정 상태, 제작품질 등 확인	∘ TCMS 등 34종 부품 형식시험 입회 - 제작품질 및 유지보수성 확인
본선 시운전	∘ 철도차량의 설계적합성 또는 형식동등성 입증 시험	∘ 초도: 역행시험 등 13개 항목 입회 ∘ 양산: ’24.8월~12월 진행 예정 (시운전 및 업무지원 추진)
완성차 관리	∘ 초도편성 수서 ~ 동탄 우선 개통 대비 운영 자회사와 합동점검 시행	∘ 주차제동 완해 고정핀 개선 등 15종 조치 및 관리요청

ㅇ 차량반입(미참여)

- 내    용: 차량제작사 공장으로부터 기지 반입 시 차량 안전관리

- 사    유: 차량 기지 반입 시 육로 운송(트레일러)으로 인한 미참여

ㅇ 준공자료

- 기    간: ’24. 1. 23. ~ 2. 15.

- 검토자료: 초도편성 재정구간 GTX-A노선 중정비 및 경정비 매뉴얼

- 내    용: 유지보수에 필요한 정기적 교환 부품(품목) 기재 적정성 등 검토 후 운영사(자회사) 송부

□ 향후 계획

ㅇ 납품 완료 시까지 이례사항(고장 등) 개선방안 기술검토 등 지속관리

ㅇ 양산편성 운정기지 보관상태 관리 및 완성차검사, 시운전시험 지원

ㅇ 품질향상 개선사항 및 출고검사 지적사항 조속 조치추진 및 관리

ㅇ 센터와 운영사 간 개선사항 완료 후 합동점검 및 인수인계 추진

ㅇ 양산편성 증명서 발급 전 준공자료(정비지침서, 검사기준서 등) 기술 검토 지원

붙임  1. GTX-A노선 제작 단계별 업무분장 1부.

2. GTX-A노선 편성별 공정 진행 현황 1부.  끝.