문서번호	도시정비과-7011
결재일자	2024. 7. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	공공개발팀장	도시정비과장	균형발전기획관		균형발전본부장
이재호	금종융	오승민	김창규		07/08
					김승원
협 조
	예산6팀장			김은하

구) 노량진 취수장 개선사업 예산변경 계획

2024. 7.

균형발전본부

(도시정비과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

구)노량진 취수장 개선사업 예산변경 계획

도시정비과장: 오승민 ☎2133-8485 공공개발팀장: 금종융 ☎8490 담당:이재호☎8645

구)노량진취수장 개선사업 공사기간 연장으로 감리비 추가 소요비용이 발생되어 시설비 일부를 감리비로 예산 변경하여 집행하고자 함

□ 사업개요

ㅇ 위    치 : 동작구 본동 5-2번지 일대(대지면적: 4,900㎡)

ㅇ 규    모 : 지하1층/지상1층 (연면적: 659㎡)

ㅇ 사업기간 : ’21.1. ~ ’24.10.

ㅇ 총사업비 : 4,641백만원(시비)  ※ 시설비 4,434/ 감리비 등 207

ㅇ 사업내용 : 옥상 조망공간, 보행자 및 자전거 이용자 편의시설 조성 등

□ 추진경위

ㅇ ’21.3.         : 구)노량진취수장 개선사업 추진계획

ㅇ ’21.3.~6.      : 건축물 및 옹벽 정밀안전진단용역

ㅇ ’22.3.~’23.1.  : 실시설계용역

ㅇ ’23.3.~’24.10. : 공사 시행(중)   ※ 준공기한 연기(’24.5.→’24.10.)

ㅇ ’23.3.~7.      : 남부수도사업소 연간단가업체 가설 사무실 이전 및 석면조사 용역 시행 등

□ 연차별 투자현황

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	’21년	’22년	’23년	’24년
계	4,641	1,254	137	1,250	2,000
시 설 비	4,434	1,250	-	1,184	2,000
감 리 비	199	-	133	66	-
사무관리비	8	4	4	-	-

□ 예산 변경사유

ㅇ 본 사업은 ****************************************************************************************됨

ㅇ ******************************************************************************************************** 필요

※ 동일 단위사업 내 세부사업 내 편성목(통계목) 간 예산 변경 사용 가능

ㅇ 2024년 예산현황(6월 현재)

(단위: 백만원)

구 분	**** ****	***	****	**** ***	*****
계	*****	*****	***	***	*
시설비	*****	*****	***	***	***
감리비	**	**	*	**	**

□ 조치계획

ㅇ 공사 ******************************************************************** 조정하되

ㅇ 총사업비 범위내에서 사업추진하고 추가 비용 발생시 자치구 부담

(단위 : 백만원)

예산과목					예산현액	증감내역		변경후 예산현액
**	**	**	***	***		*	*
***************	***********	**** ********	**** *** *****	*** ****	*****	*	**	*****
				*** ****	**	**	*	**

붙임  1) 예산변경 요구서 1부.

2) 위치도 및 조감도 1부.

3) 동작구 요청 공문 1부.  끝.