문서번호	하천관리과-1734
결재일자	2014.2.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	치수설비팀장	하천관리과장		물관리정책관
서태창	구자훈	한유석		02/04 정만근
협 조
	방재안전시설부장		박종웅

빗물펌프장 신·증설사업 공정 점검회의 개최

도 시 안 전 실

(하 천 관 리 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	도시기반시설본부	)		무 □
	●	민간단체	:	유 ■	(	감리단	)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

빗물펌프장 신·증설사업 공정 점검회의 개최

방재시설 확충 사업의 원활한 추진 및 현안사항 협의를 위한 공정점검회의를 정기적으로 실시하여 2014 수방에 대비코자 함.

공사중 빗물펌프장

구 별	펌프장명	총사업비	신,증설 현황	준공일 (예정)	시행부서
성 동	사근	9,440	1,500hp×2(1,020㎥)	‘14.06	도시기반시설본부
	송정	9,991	900hp×2(616㎥)	‘14.12	“
동대문	용두	4,181	160hp×3(240㎥)	‘14.12	“
	신이문	5,880	400hp×3, 250hp×1(875㎥)	‘15.06	“
	장안2	3,896	250hp×2(133㎥)	‘14.06	동대문구청
중 랑	면목4	3,890	Φ1,500×2 L=143m	‘14.06	도시기반시설본부
노 원	공릉	11,842	770hp×2(520㎥)	‘15.06	“
마 포	중동	5,359	350hp×1,350hp×1(210㎥)	‘14.12	“
	합정	8,782	360hp×2(160㎥)	‘15.06	“
강 서	방화	4,796	350hp×2(380㎥)	‘14.06	“
	염창2	6,696	1,100hp×2(660㎥)	‘14.12	“
	공항	4,805	670hp×1(320㎥)	‘14.06	강서구청
	마곡2	35,964	1,200hp×5,600hp×2(2,600㎥)	‘15.12	SH 공사
관 악	신림2	14,003	410hp×4,160hp×1(800㎥)	‘14.12	도시기반시설본부
강 남	잠원1	28,370	915hp×5(1,400㎥)	‘15.06	“
	수서	18,120	(650㎥)		한국철도시설공단
용산	한강교	11,767	1,100hp×2, 600hp×2(860㎥)	‘16.12	용산구청

회의개요

관리대상: 2014년 완료 예정인 10개 사업

사근, 송정, 용두, 장안2, 면목4, 중동, 방화, 염창2, 공항, 신림2

회의일시: 매월 3째주 수요일 오후 2시

장   소 : 서소문청사 8층 회의실

참 석 자

- 주        관 : 물관리정책관

- 사업주관부서 : 하천관리과장, 치수설비팀장

- 시 행 부 서  : 도시기반시설본부 방재시설부장, 설비부장, 담당과장

해당 자치구 치수방재과장

- 감  리   단  : 감리단장

회의 내용

2014년 수방대비 공정보고 및 향후 계획

현안사항 협의

관련부서 협조사항 등

행정사항

회의 자료 하천관리과로 송부

- 매월 말일을 기준으로 한 공정보고서

- 공사중 현안사안 및 타부서 협조사항 등

감리단장 참석할수 있도록 시행부서에서 통보.

별첨 : 공정보고서 양식 1부.끝.