문서번호	조경과-1724
결재일자	2014.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	조경시설팀장	조경과장		푸른도시국장
최경주	한정훈	이원영		02/11 오해영
협 조

-녹지활용계약 주민쉼터 조성을 위한-

천호동성당 산책로 보완 계획

2014. 2.

푸른도시국

(조경과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 ■	(	시민참여 행사 전개	)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	해당 자치구	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

- 녹지활용계약 주민쉼터 조성을 위한 -

천호동성당 산책로 보완 계획

제1호 녹지활용계약 쉼터인 천호성당 임야 내 급경사 산책로를 보완함으로서 개방성을 확보하여 지역의 커뮤니티 장소 및 쾌적한 휴식공간으로 조성하고자 함

녹지활용계약(주민쉼터) 사업개요

대 상 지 : 수목이 울창한 사유지

사업내용 : 편익시설 설치, 수목식재, 안내판 설치 등

사업기간 : 2011 ~ 2016(계속)

총사업비 : 5,630백만원(’13년이전 2,630, ’14년 1,050, ’14년이후 1,950)

추진실적

연도	위 치	조성면적 (㎡)	사 업 비 (백만원)	비 고
계	총 8개소	128,025	2,630
2011	천호동 397-413일대(천호동성당)	3,300	800
2012	상계동 산44-28 일대 외 2개소	117,511	930
2013	중림동 149-2일대(약현성당) 외 3개소	7,214	900

2014년 계획 : 1,050백만원

- 천호동성당 산책로 보완 사업(150백만원)

- 중구 문화교회 도시녹화 사업(900백만원)-별도 계획 수립 예정

2014년 천호동성당 산책로 보완사업 계획

사업규모 : 400㎡ (L=120, W=3~4m)

사업내용 : 급경사 산책로 정비, 수목식재 등 이용시민 편익증진

사업기간 : 2014. 2. ~ 6.

사 업 비 : 150백만원

사업시행 : 강동구청 (푸른도시과)

	천호동성당 쉼터(서울시 제1호 녹지활용계약) 현황
○ 위 치 : 강동구 천호동 397-413 ○ 면 적 : 3,300㎡ ○ 조성기간 : 2011. 6. 29. ~ 11. 18. ○ 조성내용 : 장미 외 13종 13,600주 식재, 편익시설 설치 등

추진일정

2014.  2월     : 사업계획 수립 및 시달

2014.  2월 ~  3월  : 설계용역 및 설계심의, 변경계약 체결

2014.  4월 ~  5월  : 공사시행

2014.  6월           : 준공 및 개방공고

행정사항

서울시 기술용역 타당성심사 결과를 첨부하여 설계용역비 배정 요청

- 기술용역 타당성심사 의뢰(자치구)⇄타당성심사(기술심사담당관)⇨설계용역비 배정 요청

설계심의 결과에 따라 공사비 조정 후 재배정

사업 착공 및 준공 시 5일 이내 사업내역 첨부 보고

금년 녹지활용 변경계약(금년 지원에 따른 계약기간 변경 및 계약토지구역 변경 표시 등) 후 사업 시행

붙 임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.

위치도 및 현황사진

▢ 위치도 (강동구 천호동 397-413, 천호동 성당)

▢ 대상지 전경