문서번호	도로시설과-2243
결재일자	2014.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	한강교량팀장	도로시설과장		시설안전정책관
전봉재	하현석	이용심		02/11 정시윤
협 조
	시설기획팀장		김종호

2014 한강교량

수중구조물 점검계획 보고

2014.  2.

도 시 안 전 실

(도로시설과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

2014 한강교량

수중구조물 점검계획 보고

한강교량의 안전한 관리를 위한 2014년 한강교량 수중구조물

점검계획을 보고함.

Ⅰ		점검개요

목    적 : 한강교량의 수중구조물의 손상부를 조기에 발견하여 적기에 보수·보강함으로 시설물과 이를 이용하는 서울시민의 안전성 확보

점검주기 : 교량의 정밀안전진단 시행 시기를 고려하여 5~6년 주기

점검대상 : 32개 교량 1,360기

구 분		교량현황	수중구조물 현황			비고
			계	본교	램프
합 계		32	1,360	1,207	153
한강교량	횡단	19	830	714	116
	종단	5	477	450	27
지천교량	안양천	3	14	11	3
	중랑천	4	37	30	7
	탄천	1	2	2

※ 잠실철도교 : 서울메트로 관리시설물로 수중구조물 점검대상 제외

점검실적

❍ 1회차(’00년 ~’04년) : 한강상 교량 19개교   674기 점검

❍ 2회차(’05년 ~’09년) : 한강상 교량 24개교 1,027기 점검

❍ 3회차(’10년 ~’14년) : 한강 및 지천 32개교 1,121기 점검

※ 2013년 5개 교량 246기 점검 : 구조안전 위협 요인 발견 안됨

Ⅱ		2014년 점검계획

추진방안

❍ 점검 장비 운영 및 관리 방안을 수립하여 계획적이고 효율적 점검업무 수행

- 수중점검의 효과 극대화를 위해 차년도 안전진단 대상 교량 우선점검

(’14년 점검 → ’15년 분석)

❍ 체계적이고 효율적인 자료 관리를 위한 기존 아날로그 데이터의 디지털화

❍ 점검장비 개량을 통해 장비 호환성 향상으로 점검업무 효율성 증대

점검개요

❍ 점검대상 : 올림픽대교 외 5개 교량 수중구조물 210기

- ’15년 정밀안전진단용역 대상 교량

❍ 사업기간 : ’14. 3 ~ ’14. 11

❍ 사업내용 : 올림픽대교 외 5개 교량의 수중구조물(우물통) 점검

❍ 사 업 비 : 460백만원

장비운영 계획

❍ 운영방식 : 1개조 상시점검, 필요시 2개조 운영

- 장비 특수성으로 절대 정비 기간 필요

- 수상 및 수중에서 점검이 이루어져 예상치 못한 장비고장 발생

❍ 운영기간 : ’14. 4 ~ ’14. 11

- 실제 운영기간 : 6개월(4,5,6,9,10,11월)

‣ 7~8월 우기시 점검불가

‣ 11월 하반기 동절기

- 15일/월 × 6월/년 – 동절기 10일 = 80일/년간

❍ 운영계획

- 1개조 60일(75%), 2개조 20일(25%)로 운영

Ⅲ		수중구조물 점검 개선 계획

점검 장비간 호환성 확보

❍ 점검 장비간 운영체계(컨트롤 박스)를 통일하여 호환성 확보

❍ 현 황

- 점검선간 컨트롤 박스 운영 체계 상이(점검선 2호만 유닉스)

- 점검선 2호 컨트롤 박스 고장시 대체 운영이 불가

❍ 개선방안

- 점검 장비간 컨트롤 박스 운영체계 통일(유닉스 → 윈도우 변경)

❍ 소요예산 : 29백만원

- ’14년 : 컨트롤 박스 및 케이블선 교체(9백만원, 본 예산 활용)

- ’15년 : 케이블 드럼 및 수중카메라 등 교체(20백만원,’15년 예산으로 추진)

아날로그 데이터의 디지털화 및 데이터 통합관리

❍ 아날로그 Data의 디지털화로 자료의 통일성 및 접근성 향상

❍ 현 황

<기존영상자료>

- 아날로그 방식인 비디오 테이프로 촬영 저장으로 현재 사무기기로 자료 접근이 불가

- 습기 등으로 인한 보관시 자료의 훼손 우려

❍ 디지털 변환 자료 관리

- 디지털 변환기기를 통한 아날로그 데이터를 디지털 데이터로 변경

- 디지털 자료 변화로 자료의 통일성 확보

❍ 소요예산 : 9백만원( ’14년도 5백만원, ’15년도 4백만원)

- 예산과목 : 시설물 품질향상 및 유지관리(사무관리비)

Ⅳ		행정사항

2014년 한강교량 수중구조물 점검(청소) 용역시행

❍ 용 역 명 : 2014년 한강교량 수중구조물 점검(청소) 용역

❍ 입찰방식 : 일반공개경쟁

❍ 용역기간 : ’14. 3 ~ ’14. 11

❍ 용 역 비 : 430백만원

❍ 점검대상 : 6개교량 210기

(올림픽대교,잠실대교,원효대교,마포대교(하),서강대교, 양화대교(하))

❍ 세부 추진일정

-’14. 2월 : 용역 발주 및 계약

-’14. 3 ~ 11 : 용역 시행

장비수리

❍ 목    적 :’14. 3월 수중 구조물 점검을 위해 필요한 장비 수리

❍ 대상장비 : 모선, 고무보트, 점검선 2호, 점검선 3호

❍ 수리내역 : 선외기 2기 수리, 점검선 2호 윈치 수리 및 구매,

점검선 3호 컨트롤 배선 수리

❍ 소요비용 : 총 4,500천원

❍ 지출방법 : 일반지출(공공운영비 활용)

첨  부 : 1. 수중구조물 전수조사 현황 1부.

2. 점검장비 현황 1부.

3. 년간 수중구조물 점검일 산정 1부.

4. 기존 수중구조물 점검자료(영상) 현황 1부. 끝.