문서번호	동물보호과-2684
결재일자	2014.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	동물관리팀장	동물보호과장		보건정책관
송부용	이운오	박범		02/13 김창보
협 조

어린이 대공원내

『반려견 놀이터』시설 개․보수 계획

2014.  02.   .

복지건강실

(동물보호과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 ■	(	반려동물 애호인	)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	동물보호법, 도시공원 관련법	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 ■ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 ■
				취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 ■	(	국토교통부,농림축산식품부	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	어린이 대공원	)		무 □

어린이 대공원내

『반려견 놀이터』시설 개․보수 계획

어린이 대공원내 반려견 놀이터를 설치 운영한 결과, 이용견주의  만족도가 높았으나 일부 시설보완이 필요하다는 의견에 대해 개․보수하여 「반려견 놀이터」운영에 만전을 기하고자 함.

I		추진근거

어린이 대공원 반려견 놀이터 운영결과

동물보호과 – 5816호('13.05.11) / 복지건강실장 방침

반려견 놀이터 이용견주에 대한 설문조사

동물보호과 - 15640호('13.12.23)

- 이용 만족도 : 92.9% 만족

- 개선 의견 : 놀이터 바닥개선(30.2%), 견주 쉴 공간 마련(25.6%) 등

Ⅱ		시설개요 및 운영실적

시 설 명 : 어린이 대공원 「반려견 놀이터」

위    치 : 어린이 대공원(구의문 주차장 옆 녹지대)

규    모 : 747㎡(226평) - 중․소형견 및 대형견 분리 설치

주요시설

놀이터(운동장) : 안전휀스(메쉬휀스) 및 이중 출입문 설치(중․소형견, 대형견 분리)

운영실(가로판매대 임대), 마킹장소(소변용), 급수시설, 이용자 편의시설(벤치), 반려견 음수대(밧트), 입간판 및 이용안내판, 현수막 등

기타 청소 관리용품 등 구입(오물수거통, 쓰레기 봉투 등)

전기가설(가로등), CCTV 설치, 수목 등 : 어린이대공원 협조지원

반려견 놀이터 운영 실적

반려견수(마리)			반려견주	비 고 (이용 반려견 및 반려견주)
계	중․소형견	대형견
5,178	4,495	683	6,839	1일 평균 60마리 / 1일 최대 200마리 1일 평균 79명 / 1일 최대 400명

사업비 : 15,600천원(집행)

Ⅲ		시설 개·보수내역

반려견 놀이터 바닥 개․보수 공사

개․보수 면적 : 747㎡(226평)

- 중․소형견 : 459㎡(출입통로 포함)

-  대 형 견  : 288㎡

개․보수 방법 : 기존 바닥 토사 일부를 파내고 마사토로 메워 다짐

(두께 : 15㎝ 터파고. 15㎝ 되메우고 다지기)

소요 예산 : 7,800천원(시설비)

이용시민 편의시설 보완

설치 품명 및 수량 : 야외용 벤치(평의자) 4개 구입 – 상판 원목

- 설치 위치 : 중․소형견 2개소, 대형견 2개소 고정 설치

구입 방법 : 제작 업체에서 직접 구매

소요 예산 : 800천원(사무관리비)

반려견 놀이터내 음수대 설치

설치위치 : 반려견 놀이터내 2개소(중·소형견 1, 대형견 1)

설치방법 : 놀이터 진입로 수도관 ⇒ 놀이터내로 인입설치(길이 50m)

- 놀이터내 수도(음수대․수도꼭지 각 2개)설치, 배수관 설치(2개소)

용   도  : 반려견 식수공급 및 놀이터 바닥 세정용

설치협조 : 어린이 대공원 협의후 설치

Ⅳ		향후 추진일정

2014. 02.18~27  : 시설 개보수 발주 및 공사 실시

2014. 02.28.      : 반려견 놀이터 주변 청소 및 개장 준비

2014. 03.01       : 개장 예정

※ 동절기 기상상황으로 공사가 지연될 경우 공사완료 이후 개장일 조정 예정