문서번호	도로관리과-2440
결재일자	2014.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로관리과장	시설안전정책관
허원회		최동필	02/13 정시윤
협조
	도로안전시설팀장		代허원회

‘14년도 방음시설 설치 및 보수·보강사업 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 2

시설안전정책관

(도로관리과)

‘14년도 방음시설 설치 및 보수 ․보강사업 추진계획

시도변의 정온한 환경을 요하는 학교, 주거지역에 설치된 방음시설이 경과년수가 오래되어 노후, 도로소음 기준치 초과 등으로 안전사고 위험 및 도시경관을 저해하고 있으므로 보수․개량하여 쾌적한 주거 및 도로환경을 유지하고자 함.

□ 방음시설 관리현황

(‘12.12월말 기준)

계	방음벽	방음터널	방음언덕	비고
420개소 (161.3㎞)	414개소 (154.27㎞)	2개소 (0.33㎞)	4개소 (6.7㎞)	시도 (자동차전용도로 포함)

※ 방음터널(2개소, 0.33㎞) : 동부간선도로(청담대교 북단~건대입구역사거리) 2개소

※ 방음언덕(4개소, 6.7㎞) : 올림픽대로 3개소, 양재대로 1개소

□ 방음시설 신설 및 정비 현황(최근 3년간)

계	2011	2012	2013	비고
14개소, 2,160m (신설 8, 정비 6)	4개소, 1,008m (신설 3, 정비 1)	6개소, 528m (신설 3, 정비 3)	4개소, 624m (신설 2, 정비 2)	방음벽 신설 및 정비
5,177백만원	1,844백만원	1,330백만원	2,003백만원

※ 2012년도 : 저소음포장 및 방음벽 정비(시설공단)

- 저소음포장(2개소) : 174a, 437백만원(시도 24a, 60백만원, 전용도로 150a, 377백만원)

- 방음벽 정비(1개소) : 110m, 180백만원(전용도로)

※ 2011년도 : 저소음포장 및 방음벽 정비(시설공단)

- 저소음포장(4개소) : 263a, 1,106백만원(시도 150a, 596백만원, 전용도로 113a, 510백만원)

- 방음벽시설 설치 및 정비(6개소) : 4,789m, 1,495백만원(전용도로)

□ ‘14년도 방음벽 시설 정비사업 추진계획

○ 사업개요

- 사업기간 : ‘14. 2 ~ 12월

- 총사업비 : 2,000백만원(자치구 재배정 시행)

- 세부내역

연번	기관별	사업비 (백만원)	사업위치	사업내용	비고
계		2,000	7개소	H=1.0~8.0m, L=1,051m
1	중구	351	(삼일대로) 남산1호터널입구	개 량 H=2.0~6.0m, L=165m	흡음형→투명형 교체
2	성북구	100	(솔샘로, 지봉로) 정릉지하차도 및 동망봉터널 앞	보 수 H=1.0~4.5m, L=220m	목재 식생 보수
3	영등포구	241	(여의동로) 여의도 고등학교 앞(2차)	개 량 H=4.0~5.0m, L=68m	흡음형→투명형 교체
		210	(경인로) 영등포초등학교 앞(2차)	개 량 H=8.0m, L=57m	〃
4	송파구	500	(올림픽로) 풍납중학교 앞	개 량 H=6.0m, L=181m	〃
		442	(도곡로) 아주 중학교 앞	개 량 H=6.0m, L=160m	〃
5	서초구	156	(신반포로) 반포중학교 앞	보 수 H=6.5m, L=200m	방음판 교체 및 보수

○ 사업예산 재배정 계획

- 3개구(성북구, 영등포구, 송파구)는 자체설계 완료로 공사비 재배정

- 2개구(중구, 서초구)는 지역여건 및 안전을 고려하여 우선 기술용역비 재배정하여 용역결과에 따라 추후 공사비 재배정 예정

- 예산 재배정 세부내역

기관별	예산액 (백만원)	배정액	배정잔액	사업위치	비고
	2,000	1,481	519	7개소
중구 (도로시설과)	351	20 (용역비)	331	(삼일대로) 남산1호터널 입구	기술용역 완료 후 공사비 재배정
성북구 (도로시설과)	100	100	-	(솔샘로, 지봉로) 정릉지하차도 및 동망봉터널 앞	공사비 재배정
영등포구 (도로과)	241	407	44	(여의동로) 여의도 고등학교 앞	공사비 재배정 (사업간 공사비 조정)
	210			(경인로) 영등포 초등학교 앞
송파구 (도로과)	500	500	-	(올림픽로) 풍납 중학교 앞	공사비 재배정
	442	442	-	(도곡로) 아주 중학교 앞
서초구 (토목과)	156	12 (용역비)	144	(신반포로) 반포 중학교 앞	기술용역 완료 후 공사비 재배정

※ 예산과목 : 도로시설물관리, 도로시설물 안전관리 및 수준향상, 도로 및 도로부속물관리, 방음시설 설치 및 보수․보강

□ 추진일정 및 행정사항

○ 추진일정

- ‘14.1월 : 사업 대상지역 조사 및 선정

- ‘14. 2월 : 설계(용역비, 공사비), 사업추진계획 수립 및 예산 재배정 시행

※ 2개구(중구, 서초구)는 용역비 설계, 3개구(성북구, 영등포구, 송파구)는 공사 설계

- ‘14.3~ 6월 : 용역시행(2개구)

- ‘14.4~12월 : 사업 착공 및 시행(5개구)

○ 행정사항 : 자치구에 예산 재배정(‘14.1.14 예정)

붙임 : 1. 사업비 산출내역 1부.

2. 위치도 각 1부.  끝.