문서번호	하천관리과-3040
결재일자	2014.2.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	치수설비팀장	하천관리과장	물관리정책관
김재웅	구자훈	한유석	02/25 정만근
협 조

『한남빗물펌프장외 2개소』

배수시설 성능향상 실시설계용역 시행 보고

2014. 02

도시안전실

【하천관리과】

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	3개 자치구	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □

『한남빗물펌프장외 2개소』

배수시설 성능향상 실시설계용역 시행 보고

한남외 2개소 빗물펌프장 배수시설 능력을 기존의 10년 빈도에서   30년 강우빈도로 향상시켜 해당 지역의 침수 피해를 최소화하기     위한 설계용역 시행계획 보고임.

□ 추진경위

○ 2007. 11 : 수방시설능력 향상 타당성 조사

○ 2007. 12 : 수방시설능력 4개년 추진계획 보고(10년 → 30년 빈도)

○ 2011. 10 : 2011년 풍수해대책 종합결과 보고(부시장 방침)

○ 2012. 06 : 투자심사 시행(한남외 1개소)

□ 용역 시행계획(안)

○ 대상 : 3개소(한남, 탄천, 잠원)

○ 시설현황

자치구명	펌프장	위 치	설계빈도 (년)	토출량 (㎥/min)	유역면적 (ha)	비 고
용산구	한남	한남동 531-3외	10	1,200	250	한강
송파구	탄천	가락동 508	20	1,992	508	탄천
서초구	잠원	잠원동 51-45	10	2,380	213	한강

○ 필요성

- 기존 펌프장 증설은 대규모 설비 위주로 진행되었으나 금회 용역대상은        토출관로 개선 등 소규모 투자로 증설효과 기대

- 유입량 산출과 유입․토출관로, 모터펌프 배수용량의 적정성 검토 후        30년 빈도 시설 개선

- 빗물펌프장은 준공 후 20년 이상된 노후 건축물이 79개소(전체 69.3%)        임에도 그동안 정밀점검 등을 실시하지 않아, 건축물의 상태조사 및         평가 필요(설치년도 : 한남 76년, 탄천 86년, 잠원 90년)

○ 과업내용

- 유역단위 종합적인 방재시설 검토 및 설계(공통)

‣ 유입량 산출 및 유입․토출관로, 배수펌프 용량 검토 및 개선

‣ 유역 분리, 저류조, 관거 개량, 펌프장 증설방안 등 검토

- 30년 빈도 적합 여부 및 노후설비 개량

‣ 시설용량 30년 빈도 적합 여부 검증(탄천)

‣ 유역 분리 후 적정 시설규모 검토 및 노후설비 개량(잠원)

- 노후 건축물 상태조사 및 평가(공통)

‣ 자료 수집․조사를 통한 부재별 손상 부위와 원인 파악

‣ 손상 부위에 대한 보수․보강방법 및 유지관리방안 제시

□ 용역 발주방법

○ 입찰방법 : 일반공개경쟁(PQ 및 적격심사)

○ 계약방법 : 공동계약(3개 업체 이하)

○ 용역기간 : 2014. 03 ～ 12(용역기간 250일)

○ 용 역 비 : 329,670천원(재난관리기금 활용)

□ 향후 계획

○ 2014. 03 : 기술용역 타당성 심사 및 발주

○ 2014. 04 : 용역 착수

○ 2014. 12 : 용역 준공

붙임 : 1) 빗물펌프장 위치도 및 전경사진 1부.

2) 과업내용서 1부.

3) 용역비 산출내역서 1부.  끝.