문서번호	도로보수과-987
결재일자	2014.2.4.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관		도로보수과장
권미애		02/04 이규철
협 조
	주무관		김영용

2013년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

설계변경(정산) 검토보고

2014. 02.

서부도로사업소

(도로보수과)

- 2013년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 -

설계변경(정산) 검토보고

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2013년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

○ 규    모 :

- 차선도색 L=249,382m, 차선제거 L=9,615m

- 도로표지병 설치 및 제거 N=177개

○ 공사기간 : 2013.04.24 ~ 2014.02.28

○ 시 공 사 : *******************

○ 감 리 사 :**************

○ 도 급 비 : 566,617,000원

□ 설계변경사유

○ 교통사망사고지점 노면표시 재도색 요청 및 우리사업소 관내 노면표시 탈색구간에 대한 재도색 요청 민원 등이 접수되어 노면표시 유지보수 예산범위 내에서 『2013년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 제11차 작업지시』 에 추가 작업지시(도로보수과-409, ‘14.01.14, 도로보수과-13127, ‘13.12.31)

- 추가 작업시행에 소요되는 자재분에 대해서는 시공자 책임하에 사급자재를    사용코자 함.

○ 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료, 환경보전비 정산 및 작업물량 정산 등에 따른 설계변경

□ 설계변경 내역서

○ 설계변경금액

구 분	금 액(원)			비 고
	당 초	변 경	증·감
총 공 사 비	863,013,000	862,946,970	감 66,030
도 급 비	566,617,000	566,617,000	변 경 없 음
관 급 자 재 비	296,396,000	296,329,970	감 66,030

○ 주요 공정 및 수량 변경내역

공 정	단위	당 초	변 경	증·감	비 고
차선 도색	m	249,382	256,012	증 6,630
차선 제거	m	9,615	9,380	감 235
차선 도색(야간)	m	-	-	변경없음
차선 제거(야간)	m	-	-	〃
도로표지병 설치	개	18	18	〃
도로표지병 제거	개	159	171	증 12
도로표지병 설치(야간)	개	-	-	변경없음
도로표지병 제거(야간)	개	-	-	〃

○ 예산과목

- 교통운영과, 도시교통체계 및 소통계선, 교통안전시설물관리, 노면표시선    도색 및 제거, 시설비 - 687백만원

- 도로관리과, 도로시설물관리, 도로굴착복구, 도로굴착복구공사, 시설비 - 120백만원

- 보행자전거과, 자전거이용활성화 및 교통환경개선, 자전거이용환경개선, 자전거   이용시설 확충 및 관리, 자전거도로 유지보수, 시설비 - 35백만원

- 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리강화, 도로교통   소통개선사업 - 21백만원

따로붙임  1. 설계변경내역서(정산) 1부.

2. 제비율 검증표 1부.  끝.