투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	922공구 하도급 변경계약 통보 알림[토공 및 구조물공사(2공구)-2, (주)동아지질]

1. 선진엔지니어링 지감 922-14-26(2014.01.27)호와 관련입니다.

2. 우리부에서 시행중인 서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사와 관련하여 토공 및 구조물공사(2공구)-2) 하도급 변경계약 통보에 따른 검토서가  전면책임감리원으로부터 제출되어 붙임과 같이 알려드립니다.

가. 하도급 변경계약 내용

구 분	원도급사	하도급사	도급액	하도급액	공사기간	하도급율
당 초	(주)대우건설	㈜동아지질	22,029백만원	19,495백만원	‘12.08.30~16.03.17	88.50%
변 경			23,027백만원	20,366백만원	‘12.08.30~16.03.17	88.44%
증 ․ 감	-	-	증 998백만원	증 871백만원	-	증 0.06%

나. 하도급 변경계약 사유

- 삼지건설(주) 계약구간인 2터널 굴착공사 일부(연장 66.25m) 물량을  ㈜동아지질에서 시행하는 공사구간으로 조정함에 따른 변경계약

- 도급액 중 산업안전보건관리비 일부 변경(당초 하도급사에서 일괄 집행 계약을 원도급사와 분리하여 집행하는 것으로 변경계약)

붙임 : 1. 공문 및 감리 검토 보고서 1부.

2. 하도급계약 관련자료 1부.  끝

	도시철도공무부장
주무관	권순환		공정관리과장	박용우		도시철도공무부장	전결 02/05 한동근
협조자	주무관	박용택
시행	도시철도공무부-1144	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 삼일대로 231(예장동 산5-85) 서울시청 남산별관 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	772-7163	/전송	772-7305	/	ksh1216@seoul.go.kr	/	부분공개