문서번호	교량보수과-662
결재일자	2014.2.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		교량보수과장	강서도로사업소장
김승진		안완순	02/06 이규상
협 조
	주무관			구성철
	주무관			유태용
	주무관			김규춘

2014년 상반기 도로시설물 정기점검 추진 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

강서도로사업소

(교량보수과)

『2014년 상반기』

도로시설물 정기점검 추진 계획보고

2014년 상반기 도로시설물 정기점검 계획을 수립 및 시행하여 시설물의 손상 등을 미연에 점검하고 정비하여 이용시민의 편익 을 도모하며 시설물의 내구연한 증대 및 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 관련근거

시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제6조(반기에 1회이상 실시)

『2014년 도로시설물 안전점검 추진계획』(도로시설과-828,‘14.1.16)

교량보수과-502(2014.1.24)호 관련임

□ 추진계획

점검기간 : 2014. 4. 1 ~ 5. 20(34일간)

대상시설 (총 32개소)

(단위 : 개소)

종별	합계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	지하 차도	복 개 구조물
계	32	3	6	3	6	13	1
1종	6	3		1	1	1
2종	10		2	2	2	3	1
법외	16		4		3	9

점검방법 : 시설물 담당직원 (3인 1조)

□ 점검반 편성 : 2개조

- 1조 : 유태용, 김규춘, 손명환,  2조 : 구성철, 김승진, 손명환

※ 소장 : 한강교량(성산,가양,행주), 안양교 점검시 참여

※ 교량보수과장 : 한강교량(성산,가양,행주), 안양교, 염창IC,

경인1지하차도 점검시 참여

시설물 개요

연번	구분	시설물명	위 치	시설규모(m)		준공일	종별	등급
				폭	길이
1	한강교량	성산대교	마포구 망원동 ~ 영등포구 양평동	8.9 ~ 39.15	2,180	1980.6.30	1	C
2		가양대교	강서구 가양동~ 마포구 상암동	16.5~ 29.0	1,700	2002.05.31	1	B
3		행주대교 (상,하류교)	강서구 개화동~ 고양시 덕양구 행주외동	14.5	1,460	2000.12.27 1995.05.19	1	B
4	일반교량	안양교	구로구 구로동 682 ~ 광명시 철산 산1	22.0	266	1977.7.30	2	C
5		염창교	강서구 염창동110~ 양화동163	39.4	300	1985.12.31 1993.06.30	2	B
6		광복교	구로구 개봉동192 ~ 광명시 철산산1	19.1	67	77.07.30 98.02.05	법외	B
7		여의하류2교	영등포구 여의도동	27.8~36.8	30	2010.05.20	법외	B
8		여의하류3교	영등포구 여의도동	28~26.9	30	2010.05.20	법외	B
9		선유교	영등포구양평동양화시민공원 ~ 선유도공원	3~14	469	2002.5.21	법외	A
10	고가차도	서해안로 연결램프	구로구 개봉동	4.95~ 6.15	234	2012.01.20	1	A
11		개봉철도	구로구 개봉동 235	22.0	148	1977.7.30	2	B
12		구일	구로구 구로1동685-226	7	170	2001.12.31	2	B
13	입체 교차로	염창	강서구 염창동	6~12	260	1988.12.27	1	B
14		구로공단	구로구 구로동 700	7~23	564	1991.09.30	2	B
15		목동교동측	영등포구 양평동72-3	8~24	1,474	1987.12.30	2	B
16		오류	구로구 개봉동 68	22.0	32	1977.7.30	법외	B
17		행주	강서구 개화동246-~290	14.5~16.8	90	1988.12 1995.05.19	법외	B
18		여의하류	영등포구 여의도동80-1	27	241	1993.10.08	법외	B
19	지하차도	경인1	양천구 목동 510~ 신정동 893-1	18	1,675	1989.05.30	1	B
20		염창	강서구 염창동 104	9	225	1986.08	2	B
21		경인2	양천구 신정동 872-1~ 신월동 453-3	19	620	1993.07.31	2	B
22		가양	강서구 가양동 1	8	445	1993.06.30	2	B
23		화곡	강서구 가양동 2-21	8.0	223	1990.8.10	법외	B
24		노들길	영등포구 여의도동 ~ 영등포동(서울교 남단)	18.5	530	2005.4.30	법외	B
25		오금교동측	구로구 신도림동 288-11	32.7	323	1987.08.29	법외	B
26		목동교동측	영등포구 양평동 71-3	27.4	50	1987.12.30	법외	B
27		신정교동측	영등포구 문래동5가 27	30	42	1987.12.30	법외	B
28		고척	구로구 구로동 635	21.2	390	1989.12.28	법외	B
29		경인철도횡단	구로구 고척동	46.3	30	1988.10.27	법외	B
30		오목교동측	영등포구 양평동2가 41	20.8	326	1987.8.29	법외	B
31		여의2	영등포구 영등포동7가94	17.5	380	1990.02.26	법외	B
32	복개도로	옥림픽대로	영등포 정수장 앞	9	230	1993.10	2	B

시설물 점검계획

조별	종별	시설물명	4월	5월	담당자
1조	1종	성산대교		5.7~5.9	유태용
	1종	가양대교	4.1~4.4		김규춘
	1종	서해안연결램프		5.12~5.15	김규춘
	2종	안양교	4.28~4.30		유태용
	2종	개봉철도고가차도		5.16~5.20	유태용
	2종	공단IC	4.28~4.30		김규춘
	2종	목동교동측IC	4.14~5.17		김규춘
	법외	오류IC		5.16~5.20	유태용
	법외	화곡지하차도	4.1~4.4		유태용
	법외	노들길지하차도	4.14~5.17		유태용
	법외	오금교동측지하차도		5.12~5.15	유태용
	법외	선유교		5.12~5.15	유태용
	법외	광복교	4.28~4.30		김규춘
	법외	경인철도횡단지하차도		5.7~5.9	김규춘
	법외	오목교동측지하차도		5.7~5.9	김규춘
	법외	목동교동측지하차도	4.14~5.17		김규춘
2조	1종	행주대교(상,하류교)	4.7~4.10		김승진
	1종	경인1지하차도		5.12~5.15	구성철
	1종	염창IC	4.7~4.10		구성철
	2종	염창교		5.12~5.15	구성철
	2종	구일고가차도		5.16~5.20	구성철
	2종	염창지하차도	4.21~4.24	5.12~5.15	구성철
	2종	경인2지하차도		5.16~5.20	구성철
	2종	가양지하차도	4.21~4.24		김승진
	2종	올림픽대로복개구조물	4.21~4.24		김승진
	법외	신정교동측지하차도		5.16~5.20	구성철
	법외	고척지하차도	4.28~4.30		구성철
	법외	여의하류2교		5.12~5.15	김승진
	법외	여의하류3교		5.12~5.15	김승진
	법외	행주IC	4.7~4.10		김승진
	법외	여의2지하차도	4.28~4.30		김승진
	법외	여의하류IC	4.28~4.30		김승진

주요 점검사항

구 분	주 요 점 검 사 항
공통사항	- 포장파손, 지반침하, 균열(구조안전에 영향을 미치거나, 0.3㎜이상 - 도로시설물 등 우기대비 취약부분 집중점검 - 배수시설 상태등 불량여부 - 도로표지판, 교통안전시설 파손 여부 등
교량 및 고가	- 교량받침 및 신축이음 거동상태, 배수시설 상태 등
지하차도	- 갱구부 사면 및 옹벽 손상여부, 배수시설 상태, 타일탈락 등
복개구조물	- 구조물(슬래브, 벽체) 균열, 기초하부 세굴여부 등

점검결과 조치

□ 경미한 사항은 현장에서 즉시조치 또는 일상유지보수 업체로 하여금 신속한 보수조치

□ 구조안전에 영향을 주는 특이사항 적출시 시설안전자문위원 등과 합동점검 실시후 별도의 보수계획 수립

□ 행정사항

2014.6.20.까지 점검후 조치결과 본청 도로시설과에 제출

점검 조치결과는 도로관리시스템 및 FMS시스템에 입력

따로붙임 :  1.‘14년 상반기 도로시설물 정기점검결과(총괄) 1부

2.‘14년 상반기 도로시설물 정기점검 보고서 1부

3.  위치도 및 지적사진 1부.  끝.