투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	성동소방서 신축공사 건립의뢰에 따른 담당자 지정 및 과업지시서 작성 요청

1. 광진소방서 소방행정과의 『성동소방서 신축공사』사업의뢰에 따라 설계용역을 아래와 같이 추진코자 하오니, 분야별(기계, 전기, 통신, 조경) 업무담당자를 지정 후 설계용역발주를 위한 분야별 과업지시 내용을 2014.2.21.한 작성하여 주시기 바랍니다.

가. 사업의뢰내용

- 사 업 명 : 성동소방서 건립

- 의뢰기관 : 광진소방서 소방행정과(의뢰일자 : 2014.1.29.)

- 대지위치 : 성동구 행당동 87-4번지

- 건립규모 : 지하1/지상4, 연면적 4,950㎡

- 예산계획 :

(단위 : 천원)

구분		계	2014	2015	2016	2017
시설비	설계비	645,493	645,493
	공사비	11,599,507		3,876,000	3,876,000	3,847,507
감리비		600,000		200,000	200,000	200,000
시설부대비		35,000		11,666	11,667	11,667

나. 설계용역추진계획

- 계약방식 : 설계공모에 의한 수의계약

- 추진계획 :

․ 2014. 2. 담당자 지정 / 설계용역 준비(과업지지서 작성 등)

․ 2014. 3. 건축정책위원회 자문 / 기술심사담당관 심의

․ 2014. 4. 설계공고

․ 2014. 7. 당선작 선정 및 설계용역 착수

붙임문서 : 사업의뢰 공문 - 1부

성동소방서 신설 기본계획 – 1부

성동소방서 신설 설계지침 – 1부.  끝.

	건축부장
수신자	설비부장,방재안전시설부장
주무관	정제국		건축총괄과장	강성욱		건축부장	02/06 代강성욱
협조자
시행	건축부-1553	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 2동 덕수궁길 15	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2605	/전송	02)3708-2659	/		/	대시민공개