문서번호	토목부-2470
결재일자	2014.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
이상근		이동훈	02/11 노우성
협조

보행광장 경사로#4 가시설 폭 축소 등 현장 실정보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 2.

도시기반시설본부 토목부

「서남권 돔야구장 주변 보행자전용도로(보행광장) 설치 및 고척교 확장공사」

보행광장 경사로#4 가시설 폭 축소등 현장 실정보고

보행광장 및 고척교 공사 현장여건 변경으로 설계변경 사항이 발생되어 아래와 같이  실정보고 드림.

※ 가시설 변경 등 5개 공종 : 증19,000천원

1		관련근거

❍ 서남권(감) 2014-26(‘14.01.24.) : 실정보고(경사로#4 가시설 폭 축소 외)

2		공사개요

❍ 사업개요

- 보행광장 설치(B=28.3m, L=150m)

- 경사로 및 연결로 설치(N=5개소, B=5~20m)

- 고척교 확장(B=37.5m(8차로) → 52.5m(10차로), L=203m)

❍ 공사기간 : 2013. 4. 8 ∼ 2015. 2. 28

❍ 도 급 비 : 24,707백만원

❍ 시 공 사 : 대지건설(주), 한동건설(주)

❍ 감 리 사 : ㈜삼보기술단

3		감리단 보고내용

❍ 문제점 및 대책

연번	구 분	문 제 점	대 책	비 고
1	경사로#4 가시설 축소 등	○가시설 구간내 도시가스관 저촉	○가시설 축소하여 경제성, 시공성, 안전성 확보
		○고수부지로 연결되는 계단 폐쇄	○임시 철재 계단 설치

연번	구 분	문 제 점	대 책	비 고
2	가설(에어) 방음벽 설치	○기초 시공을 위한 천공 및 항타시 소음으로 인한 동양미래대학교로부터 민원 발생	○ 에어 방음벽 2개소 설치 - 미래대학측 9m*7m - 도로측 4m*3m
3	안양천 안전시설 설치	○고척교 하부 안양천에서 현장타설 말뚝시공시 대형장비의 이동이 빈번하여 고수부지 산책로 및 자전거도로 이용자들의 안전사고 우려	○ 안전휀스 및 데리네이터, 경광등 등 안전시설물 추가 설치
4	안양천로 가로등 철거 및 분전함 이설	○보행광장 목동방향 구조물 시공을 위해 차로 변경시 저촉되는 시설물 이설 필요	○ 가로등 철거 및 분전함 이설 - 가로등 2본 - 분전함 1면

❍ 개략공사비

【단위 : 천원】

공 종	위 치	당 초(A)	변 경(B)	증.감(△)(B-A)
1. 가시설	경사로#4	27,456	24,334	△ 3,121
2. 보행자 계단	경사로#4	-	2,073	2,073
3. 가설방음벽	보행광장	-	6,326	6,326
4. 안전시설물	고 척 교	-	4,762	4,762
5. 가로등 철거 및 분전함 이설	보행광장	-	4,884	4,884
직접공사비		27,456	42,379	14,923
제 경 비		11,544	15,621	4,077
도 급 액		39,000	58,000	19,000

4		검 토 의 견

❍ 경사로#4의 가시설 규모를 축소하여 시공함으로써 도시가스관을 보호하는 등 안전성 및 경제성에 유리 할 것으로 판단되어 시공토록 하고,

❍ 또한 인근 주민들의 안전 및 불편사항을 줄이기 위하여 도급업체에게 보행자계단, 안전시설 설치, 가설 방음벽을 설치토록하고 추후 설계변경시 반영조치하고자 합니다.

붙임 : 감리단 실정보고서 1부.  끝.