투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	지하철9호선 2단계 시스템분야 전면책임감리용역(총차, 1차, 2차) 계약변경 의뢰

1. 재무과-51731호(`13.11.28) 및 도시철도설비부-1434호(`14.2.13)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 우리본부에서 시행중인 지하철9호선 2단계 시스템분야 전면

책임감리용역(총차, 1차, 2차)에 대한 계약변경을 아래와 같이 요청하오니 조치하여 주시기

바랍니다.

가. 용 역 명 : *********************************

나. 용역개요 : 연장 4.5km(정거장 5개소, 변전소 1개소)

- 위 치 : 강남구 논현동 ~ 송파구 종합운동장

- 범 위 : 서울지하철9호선 연장건설(2단계) 시스템분야 공사 책임감리

다. 계 약 자 : 벽산파워 주식회사 외 2개사 공동도급(분담이행방식)

라. 계약 및 착수일자 : 2012.11.20

마. 예산과목 : 도시기반시설본부, 도시철도건설, 도시철도건설사업, 도시철도

9호선 2단계건설, 시설비 및 부대비, 감리비

바. 변경내용

구 분		변 경 전	변 경 후	비 고
총차	기 간	`12.11.20 ~ `15.01.08	변경사항 없음	-
	금 액	1,711,980천원	1,807,700천원	증 95,720천원
1 차	기 간	`12.11.20 ~ 14.02.24	`12.11.20 ~ `14.02.28	-
	금 액	1,079,000천원	변경사항 없음	-
2 차	기 간	`14.02.25 ~ 14.07.18	`14.03.01 ~ `14.06.30	-
	금 액	299,930천원	변경사항 없음	-

사. 변경사유

- 1차 감리용역 : 감리원 투입시기 조정으로 인한 투입인원 변경

- 2차 감리용역 : 1차 감리기간 조정으로 착수일자 및 준공기한 변경

붙임 : 1. 계약변경 시행 방침서 1부.

2. 감리원 변경 투입계획(총차 3회, 1차 3회, 2차 3회) 1부.

3. 변경내역서(총차, 1차, 2차) 각 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	고명규		송변전과장	김형기		도시철도설비부장	02/13 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-1437	(		)	접수		(		)
우	100-731	서울 중구 순화동 순화빌딩 12층 도시철도설비부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)772-7274	/전송	02)772-7308	/	rhaudrb@seoul.go.kr	/	대시민공개