투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	『어린이대공원 놀이동산 재조성사업 소방전기공사』 설계변경(정산) 시행

우리사업소에서 추진중인 『어린이대공원 놀이동산 재조성사업 소방전기공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산)코자 합니다.

가. 공 사 명 : 어린이대공원 놀이동산 재조성사업 소방전기공사

나. 도 급 비 : 금10,669,000원

다. 공사기간 : 2013.04.12 ~ 2014.02.17

라. 시 공 사 : (주)성림파워넷  대표 임성수

마. 변경사유 : 내역물량변경

바. 공사비 변경내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증.감	비 고
도급비	공 급 가 액	9,699,091	8,795,455	감)903,636
	부가가치세	969,909	879,545	감)90,364
	계	10,669,000	9,675,000	감)994,000

사. 예산과목 : 공원녹지정책과,공원녹지정책개발및만족도개선,시책주요공원조성,어린이대공원놀이동산재조성,시설비및부대비,시설비

붙임 : 1) 설계변경 검토 보고서 1부

2) 설계변경내역서(정산) 1부.  끝.

주무관	박진우		시설팀장	홍순철		시설과장	02/13 변규열
협조자	주무관	김인선
시행	시설과-470	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울 동작구 여의대방로20길 33 동부공원녹지사업소	/
전화	02-2181-1156	/전송	02-2181-1169	/	pjwooo@seoul.go.kr	/	대시민공개