투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	정산설계변경 시행

우리사업소에서 시행중인 『2013년 노면표시 유지보수공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 정산설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2013년 노면표시 유지보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2013. 4.22 ~ 2014. 2. 28.(변경없음)

다. 계약금액 : 412,400,000원 → 392,930,000원

라. 도 급 자 : ㈜우성산업공사 이상선

마. 설계변경사유

- 공종별 물량 변경에 따른 설계변경

바. 설계변경내역

- 공사비                                                (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총공사비	819,000,000	797,690,000	감21,310,000
도 급 비	412,400,000	392,930,000	감19,470,000
관 급 비	406,600,000	404,760,000	감1,840,000
이 설 비	-	-	-

사. 예산과목

- 교통운영과, 도시교통체계및소통개선, 교통안전시설물 관리, 노면표지선 도색 및 제거, 시설비

- 도로관리과, 도로시설물관리, 도로굴착복구, 도로굴착복구공사, 시설비

- 보행자전거과, 자전거이용활성화 및 보행환경개선, 자전거이용시설확충 및 관리, 자전거도로 유지보수, 시설비

붙임  1. 설계변경 방침서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 제비율 검증결과 자료 1부. 끝.

주무관	하승환		도로보수과장	국중진		성동도로사업소장	02/17 정진오
협조자	계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-719	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울특별시 성동구 자동차시장길 41(용답동) 성동도로사업소 도로보수과	/
전화	02-2210-1566	/전송	02-2210-1549	/	hsh1647@seoul.go.kr	/	대시민공개